문서번호	생산관리과-8103
결재일자	2017.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
신왕근		한희선	06/29 代한희선
협 조
	기획예산과장			박진용
	주무관			代안희숙

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 』

관급자재(아스팔트콘크리트) 구매 계약 변경 검토 보고

2017.  06.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사』

관급자재(아스팔트콘크리트) 구매 계약 변경 검토 보고

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사” 와 관련하여 관급자재(아스팔트콘크리트) 구매 계약 변경에 대한 검토사항을 보고 드림

※ 관련문서 : 뚝도건 제17-44(2017.06.29., “관급자재 계약 및 검수 현황 재제출)

Ⅰ		계약 개요

❍ 계 약 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재 “아스팔트콘크리트” 구매

❍ 계약업체 : 남부아스콘사업협동조합 박열규(조달구매 계약)

❍ 계약금액 : 52,136,570원(품대-51,896,970원, 수수료-239,600원)

❍ 계약일자 : 2016. 3. 23.

❍ 납품기한 : 2017. 6. 30.(분할납품)

Ⅱ		현 황

❍ 레미콘 관급자재 조달단가 변경 및 일부자재 납품수량 변경

자재명	규격	단위	수량 변경			조달단가 변경		비 고
			계약 수량	납품 수량	잔량	계약단가 (’16.3.23)	’16.7.1 이후
아스팔트 콘크리트	표층 WC-2(#78)	톤	414	313	-101	55,290	59,130
	기층 BB-2(#467)	톤	621	470	-151	46,710	51,610

Ⅲ		계약변경 내용

❍ 계약변경 사유

- 관급자재(아스팔트콘크리트) 조달단가 변동

- 관급자재(아스팔트콘크리트) 일부 자재 납품수량 감소

❍ 계약변경 내역

공종명	규격	단위	당초 계약			변경계약			증.감
			수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	금액
아스팔트콘크리트	표층 WC-2(#78)	톤	414	55,290	22,890,060	313	59,130	18,507,69	-101	-4,382,370
	기층 BB-2(#467)	톤	621	46,710	29,006,910	470	51,610	24,256,700	-151	-4,750,210
	소 계				51,896,970			42,764,390		-9,132,58
	수 수 료				239,600			230,930		-8,670
	합 계				52,136,570			42,995,320		-9,141,250

Ⅲ		검토 의견

❍ 관급자재(아스팔트콘크리트) 계약변경에 대한 책임건설사업관리기술자

의 보고 내용이 적정하므로 계약상대자인 남부아스콘사업협동조합과

상기 변경 내용으로 변경계약 코자 함

붙임 : “관급자재(아스팔트콘크리트) 계약 및 검수 현황 제출” CM 공문 1부. 끝.