상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	교량안전과장
(경유)
제목	계약심사서류 보완요청(동작대교 보수공사(설계변경))

1. 교량안전과-11691호(’17.06.29)와 관련입니다.

2. 상기대호로 계약심사 요청한『동작대교 보수공사 설계변경』에 대하여 다음과 같이 보완 요청 하오니 07.06(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

다  음

가. 발주기관의 필요에 의한 설계변경시 설계변경 요구 서류

나. 계약상대자 실정보고 서류

다. 책임감리 검토보고 서류

라. 발주기관 설계변경 보고서(설계변경 사유서)

마. 설계변경 전․후 도면

바. 설계변경 수량 및 단가산출서(일위대가 및 단가조사서, 견적서 등)

사. 설계변경 내역서, 당초 계약내역서

아. 내역 파일(신규비목 및 증가물량만 해당)

자. 설계변경 공사시방서

차. 설계변경 시점에 관한 서류

(1) 변경도면을 발주기관이 확정한 서류

(2) 변경도면이 필요 없는 경우, 계약당사자간에 설계변경을 합의한 문서

(3) 우선시공을 한 경우, 우선시공 승인 문서

카. 협의율(발주기관 요청의 경우 증가 물량, 신규단가에 대하여 적용)

타. 물량 및 단가 증감 대비표

파. 1식 단가는 풀어서 제출. 끝.

	계약심사과장
전문관	차승환		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	07/04 안호
협조자
시행	계약심사과-12743	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3330	/전송	02-2133-1032	/	chsh155@seoul.go.kr	/	대시민공개