				★ ◎															본부장 방침 제399호
문서번호	도시환경부-1778			부 원					도시환경부장					택지계획처장					택지사업본부장
보존기간	10년																						07/05
				김영주					김덕근					이광윤					김소겸
결재일자	2017.07.05
공개여부	비공개(5)			협조
일상감사	대상
								일상 감사		No.		618			감사					의견
										2017/07/04					심윤수					의견없음
보조제목을 입력하는 곳
위례지구 3공구 폐변압기 처리용역 정산 및 계약변경 시행
		서울주택도시공사
( 택지계획처 도시환경부 )

위례지구 3공구 폐변압기 처리용역 정산 및 계약변경 시행

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 위례지구 3공구 폐변압기 처리용역

용역기간 : 2017.03.06.~2017.07.05.

용역내용 : 변압기 철거, PCBs 농도 분석, 수집운반 및 처리

도급금액 : 15,884,000원(부가세 포함)

도 급 자 : ㈜진흥전기 외 1개사

Ⅱ		정산내용

(관련근거) 과업내용서 「5.15 수량정산」 및 「5.16 설계변경조건」

(당초) ①송파구 신고내용 기준으로 사양(변압기 수량, 중량, 절연유 PCBs농도 등) 및 수·중량 적용, ②3공구 중 기무부대 변압기 미포함

(정산) ①절연유 PCBs 농도분석 결과 적용, ②처리과정 중 현장에서 추가 발견된 변압기 및 기무부대 변압기 추가에 따른 실처리 수·중량 정산 반영

계약변경

Ⅲ		조치계획

계약부에 변경계약 요청.

붙임  1. 변경내역서

2. 처리사진, 계량확인서 등 관련서류(별첨).  끝.