문서번호	공원조성과-8103
결재일자	2017.7.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	생활공원팀장	공원조성과장		푸른도시국장
양지윤	박미애	최현실		07/06 최윤종
협 조
	주무관		박철수

마포 석유비축기지(탱크5) 상설전시장

전시물 설계 및 제작설치 용역

준공기한 연기 검토 보고 (제2회)

2017. 7.

푸 른 도 시 국

(공원조성과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

마포 석유비축기지(탱크5) 상설전시장

전시물 설계 및 제작설치 용역

준공기한 연기 검토 보고 (제2회)

『마포 석유비축기지(탱크5) 상설전시장 전시물 설계 및 제작·설치 용역』에 대한 준공기한 연기를 검토 보고드림

Ⅰ		사 업 개 요

❍ 위    치 : 마포구 성산동 산 53-1 일대

❍ 사업대상 : 탱크5 상설전시장 (연면적 889.85㎡)

❍ 도 급 자 : ㈜하랑그룹 대표 안철재

❍ 용 역 비 : 775,400천원

❍ 용역기간 : 2016. 4. 22. ~ 2017. 7. 10.

Ⅱ		추 진 경 위

❍ 2016.  3. 2 ~ 3. 30 : 입찰공고

❍ 2016.  4. 5   : 제안서평가위원회 개최

❍ 2016.  4. 22  : 계약체결 및 용역 착수

❍ 2016.11. 14 : 전시물 설계 완료

❍ 2017.  4. 28 : 용역 기간연장 계약 (제1회)

- 사 유 : 선행 공종인 건축공사의 공기 지연으로 인한 준공기한 연장

❍ 2017. 7.  4  : 전시 콘텐츠 추가 및 보완 검토 보고

- 시장요청사항 : 난지도 쓰레기매립지 및 월드컵공원 조성 연혁,

난지도 일대가 재생되는 과정을 영상으로 제작

Ⅲ		검 토 내 용

❍ 연기사유

- 발주부서 요청사항 반영에 따른 추가 소요기간이 필요하여 용역 준공기한 연장 (전시 콘텐츠 추가 및 보완)

❍ 준공기한 변경

구 분	용역기간		비 고
	당 초	변 경
계약기간	2016. 4. 22. ~ 2017. 7. 10.	2016. 4. 22. ~ 2017. 8. 20.	41일 연장
계약금액	775,400,000원	775,400,000원	변경없음

❍ 지체상금 부과 검토

▸ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 푸른도시국 공원조성과

▸ 지체상금 부과여부 : 미부과

❍ 처리의견

▸ 계약 상대자로부터 제출된 준공기한 연기사유가 타당하다고 판단되므로 계약부서에 준공기한 연기 요청하고자 함.

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 2017.  7.  : 전시 콘텐츠 추가 및 보완 제작

❍ 2017.  8.  : 공사완료 및 시험운행

붙임 : 준공기한 연기 요청 공문 1부.  끝.