투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	「시립중랑노인전문요양원 증축공사 설계용역」계약변경(용역기간 연장) 의뢰

우리본부에서 시행중인 『시립중랑노인전문요양원 증축공사 설계용역』과 관련하여 계약변경(용역기간 연장)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다

가. 용 역 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사 설계용역

나. 계약상대자 : ㈜건축사사무소 우리공간 대표 박 성 준

다. 계약변경 요청 내용 : 용역기간 연장(45일)

구 분	당 초	변 경	증․감
계약금액	298,000,000원	298,000,000원	변경없음
용역기간	‘17.02.23 ~ ’17.09.20	‘17.02.23 ~ ’17.11.04	45일 연장

라. 연장사유 : 계획설계 지연에 따른 설계용역 기간 연장

붙임 : 1. 설계용역 기간 연장 검토보고 1부.

2. 합의각서. 끝.

	건축부장
주무관	김찬유		건축총괄과장	박범규		건축부장	07/06 김진용
협조자	경리과장	최정수
시행	건축부-11574	(		)	접수		(		)
	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2608	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)