투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	용역 준공금 지출[모두의 학교 리모델링공사 건설사업관리용역(1차)]

㈜포스코에이앤씨건축사사무소의“대금청구 및 계좌입금의뢰서(2017.7.11.)”, 건축부-11569호(2017.7.6.), 건축부-9578호(2017.6.7.) 준공검사조서 및 지연배상금 부과 의견통보와 관련, 준공금을 지출하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 모두의 학교 리모델링공사 건설사업관리용역(1차)

2. 계 약 자 : ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 외 1개사

3. 공사기간 : 2016. 12. 26 ~ 2017. 4. 25

4. 계약금액 : 금151,080,000원

5. 전회까지 지출액 및 금회 지출액

(단위 : 원)

구 분	선 금	기 성 내 역			잔 액
		기 성 액	선금정산액	실지급액
전회까지 기지출액	0	92,836,300	0	92,836,300	58,243,700
금회 지출액		57,456,030	0	57,456,030	787,670 (준공정산 잔액)

6.  예산과목 : 건축부, 다양한 평생교육환경 조성, 평생교육사업 효율적 추진, 모두의 학교 설립 운영, 시설비및부대비, 시설비

※ 지연배상금 8,052,570원 준공금에서 상계처리하여 세외수입처리(1차 준공금 실지급액 49,403,460)

□ 지연배상금 부과 내용

❍ 계약금액 : 151,080,000원(준공금액 : 150,292,330원)

❍ 지연배상금 = 계약금액 x 지체일수 x 지연배상금률

➠ 1,546,992원 = 151,080,000원 x 41일 x 0.0013

[계약기간 : 2016.12.26~2017.4.25,  준공일자 : 2017.6.5(준공검사일) /지체일수 41일, 지연배상금률 1.3/1000(용역)]

※ 지연배상금 8,052,570원 준공금에서 상계처리하여 세외수입처리(세외수입고지서 발부)

붙임 : 준공검사조서 및 지연배상금 부과의견 통보 1부.

주무관	권혜경		경리과장	최정수		건설총괄부장	07/12 代안순봉
협조자
시행	건설총괄부-16170	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8 프리미어플레이스 빌딩 11층 건설총괄부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2371	/전송	02-3708-2365	/	ddingul@seoul.go.kr	/	부분공개(5)