문서번호	설비부-12053
결재일자	2017.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
백남진		임현근	전결 07/14 代유병기
협조

관급자재 납품기한 연기 검토보고

「어린이병원 삼성발달센터증축 전기·통신공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 07.

관급자재 납품기한 연기 검토보고

「어린이병원 삼성발달센터증축 전기·통신공사」

「어린이병원삼성발달센터 증축 전기·통신공사」의 관급자재에 대하여 공정일정 변경됨에 따라 납품기한 연장하고자 보고 드림.

1		관련근거

□ 어린이병원 전기공사 관급자재 납품연기요청 : 서도기-전-144(2017.07.13.)

□ 어린이병원 통신공사 관급자재 납품연기요청 : 서도기-통-145(2017.07.13.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시어린이병원 삼성발달센터증축 전기·통신공사

□ 공사규모 : 지하2층/지상5층 연면적11,950㎡ 전기·통신설비 1식

□ 공사기간 : 2015. 04. 20 ～ 2017. 07. 28

□ 공 사 비

- 전기 2,262,548천원(도급비1,137,826, 관급비1,018,417, 이전비106,305)

- 통신 860,839,640원(도급비490,955,000원, 관급비369,884,640원)

□ 시공사(전기/통신) : 길흥전기(주)/유복전기(주)

□ 감 리 사 : (주)영화키스톤

3		검토내용

가. 관급자재 계약 현황

□ 전기분야

품 목	건 명	계약업체	계약금액	납품기한	비고
UPS	UPS장비구매	㈜영신 엔지니어링	55,336,000	2017.07.14.

□ 통신분야

건 명	품 목	계약업체	계약금액	납품기한	비 고
주차관제설비	주차관제1식	㈜토마토전자	57,003,800	2017.05.30.

가. 관급자재 납품기한 연기

□ 납품기한 연장 사유

- 선행공정(건축분야) 지연에 따른 납품(설치)시기 미도래

□ 전기분야

건명	납품요구번호 (계약번호)	계약자	계약금액	납품기한		비 고
				당초	변경
UPS 장비구매	12-16-2-14999-01	㈜영신 엔지니어링	55,336,000	2017.7.14	2017.7.28

□ 통신분야

건 명	납품요구번호	계약업체	계약금액 (원)	납품기한		비 고
				당 초	변 경
주차관제설 비	12-16-2-15686-00	(주)토마토전자	57,003,800	2017.7.14.	2017.7.28

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		조치계획

□ 선행공정(건축공사) 공기연장에 따라 후속공정인 전기․통신공사 관급자재 납품(설치)시기가 미도래하고

□ 건설사업관리기술단 검토보고 한 내용이 적정하다고 판단되어 현장여건에 맞추어 관급자재 납품기한을 연장하고자 함.

붙 임 :  관급자재 납품기한 연장 관련 문서   2부. 끝.