문서번호	노동정책담당관-7419
결재일자	2017.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		노동보호팀장		노동정책담당관
정유진		이민제		07/20 박경환
협 조

노동복합시설 리모델링 설계T/F팀 운영계획

2017. 7.

일자리노동정책관

(노동정책담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

노동복합시설 리모델링 설계 T/F팀 운영계획(안)

전태일 기념관 건립 및 노동시설 집약화를 위해 추진중인 노동복합시설 리모델링 설계 T/F팀을 구성·운영코자 함.

1		추진개요

□ 사업개요

○ 위    치 : 종로구 관수동 152-1

○ 규    모 : 1층~6층(옥탑포함) / 토지 553.1㎡, 건물 2,062.24㎡

○ 사업기간 : 2016.9~2018.4월

○ 용    도

구 분	용 도
1층	이동노동자쉼터, 주차장, 기계실 등
2층	전태일 기념관 및 노동운동사 전시관
3층	교육장, 시민편의공간
4층	노동 스페이스, 비정규직 근로자 건강증진센터
5층~6층(옥탑)	노동권익센터, 감정노동종사자 권리보호 센터

○ 총사업비 : 2017년(180억원) 2018년(공사비 및 감리비 등 추가 확보)

- 2017 매입비, 설계비, 중개수수료 등 부대비 및 공사비 12억 확보

○ 추진절차

기본계획 수립	⇨	투자심사 및 공유재산 심의	⇨	건물매입	⇨	설계용역	⇨	공사 발주 및 시행
추진완료 (’16.9월~’17.5월)					추진중 (’17.7~9월)		추진예정 (’17.10월~’18.4월)
노동정책담당관 추진							도시기반시설본부 추진

○ 위치도 및 현황사진

□ 추진경위

○ 노동복합시설 조성 건물매입 및 리모델링 계획 수립	’16.9월

○ 市 투자심사 및 공유재산 심의(조건부 적정)	’16.10월

- 노동복합시설 활용계획 수립 및 공사비 등 총사업비 재 산정 추진

○ 건물매입 감정평가	’17.1월

○ 부동산 매매계약 체결 및 소유권 이전	’17.3~5월

○ 정밀안전진단 및 실측용역 추진(결과:C등급)	’17.3월

○ 건물 리모델링 설계공모 추진	’17.5월

- 당선자 : 서울시립대 윤정원 + ㈜하우건축사사무소 오세범

○ 노동복합시설 설계용역 시행계획 수립	’17.6월

○ 건물 내진성능 평가용역 추진	’17.6~7월

○ 설계용역 추진	’17.7~9월

2		T/F팀 운영계획

□ T/F팀 구성

○ 추진근거 : 운영자맞춤형 설계 및 보고체계 구축 등 사업추진 프로세스 개선계획(시장방침 제26호)

○ 주요기능

- 노동복합시설 실 사용자와 설계 컨셉, 추진방향 및 다양한 의견 수렴

- 조성 후 시설물 운영 및 유지관리계획 논의

○ 구성인원 : 7~9명

- 입주시설 관련자(택시물류과 1명, 보건의료정책과 1명, 서울노동권익센터 1명)

※ 부서일 경우 담당팀장 및 담당자, 노동권익센터는 사무국장

- 전태일 기념관 건립 기본구상 연구용역 책임연구소(한국문화정책연구소 1명)

- 설 계 자((주)하우건축사사무소 2명)

- 발주부서(노동정책담당관 2명)

□ T/F팀 운영

○ 운영방법 : 공사 착공 전 설계단계 중 3회 범위 내 회의개최를 통해 의견 수렴한 내용을 설계에 반영

○ 운영시기 : 설계용역 착수보고, 중간보고, 준공보고 시점

○ 1차회의 개최

- 일    시 : ’17.7.25.(예정)

- 장    소 : 노동복합시설 리모델링 건물 내(관수동 152-1)

- 논의내용

· 노동복합시설 건물 리모델링 기본계획 설명(노동정책담당관)

· 노동복합시설 건물 현장 및 설계방향 설명(설계자)

· 입주시설 설계 관련 자유의견 개진

3		향후일정

○ T/F팀 운영계획 통보 및 회의참석 요청	’17.7.20.

○ 설계용역 추진	’17.7~9월

○ T/F팀 2~3차회의 개최	’17.8~9월

○ 공사 의뢰(→도시기반시설본부)	’17.10월

○ 공사 시행(도시기반시설본부)	’17.11~’18.4월

○ 준공 및 개관	’18.4월