＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계공모 및 기술심사 등 사전절차 의뢰(창작연극 지원시설)

1. 도시공간개선단-6017(2017.5.15.)호와 관련입니다.

2.『창작연극지원시설』설계공모 추진 관련, 사업적정성 절차 이행 등 보완요청 결과와 사업추가 내용을 아래와 같이 회신(통보)하오니, 설계공모 및 기술심사 등 사전절차 이행에 협조하여 주시기 바랍니다.

아          래   -

가. 사전적정성 검토결과 반영

○ 공사기한 연장 : 38개월 → 41개월(3개월 연장)

구 분		당 초	변 경	증 감
설 계	설계기간	10개월	10개월	-
공 사	발주·계약준비	3개월	3개월	-
	공사기간	25개월	28개월	3개월
합 계		38개월	41개월	3개월

* 연장사유 : 암반굴토 및 잔해 처리기간 소요에 따른 공기연장

○ 사업비 증액 : 설계용역 이후 반영(예산담당관 의견)

→ 현재 확정된 설계용역비(1,130백만원)로 사업 추진

나. 사업내용 추가 : 지하철 연결을 위한 지하공간 확보(50㎡, 지하 2층)              ○ 총 연면적 증가 없이 현재 연면적(8,056.73㎡)내에서

내부시설 규모를 일부 조정하여 공간 확보

→ 주차장으로 우선 활용하고, 향후 지하철역 연결시 개통

첨  부 : 중앙투자심사 의뢰 서류. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),도시공간개선단장
주무관	송인숙		문화시설총괄팀장	이정연		문화시설과장	07/24 代이정연
협조자
시행	문화시설과-6276	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 12층 문화시설과	/
전화	02-2133-4213	/전송	02-2133-1443	/	cool1099@seoul.go.kr	/	대시민공개