문서번호	생활보건과-17837
결재일자	2017.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	감염병대응팀장	생활보건과장
박신향	강문종	07/25 김선찬

´17년 감염병관리지원단 사업 중간보고서 검토결과 보고

2017. 7.

서울특별시

(생활보건과)

´17년 감염병관리지원단 사업 중간보고서 검토결과 보고

1		사업추진 개요

□ 사업기간 : ’17.1.1 ~ 12.31.(17년 사업계획서 질병관리본부 제출(17.3.))

□ 수행기관 : 서울대학교 산학협력단(감염병관리지원단)

□ 소요예산 : 600,000천원(국비300,000천원, 시비300,000천원)

□ 사업개요

2017년 서울특별시 감염병관리지원단의 사업 계획

◦ 사업의 필요성

서울특별시의 특성에 맞는 감염병 관리 체계를 구축하여 감염병 발생 및 전파의 예방을 통해   시민의 안전과 더불어 전 국민의 감염병 예방에 기여

◦ 사업의 목적

서울특별시의 감염병 대응의 신속성과 정확성을 높일 수 있도록 교육 및 사업 지문을 하며, 필요 시    현장 대응에 참여함.

◦ 사업의 내용 및 방법

1) 감시분석·기획

- 감염병 감시 주간보고 발행

- 해외 유행 감염병 모니터링

잠정통계 발행 및 자치구별 자문

감염병 예방홍보자료 기획

감염병 시민소식지 발행

- 중증급성호흡기감염증 감시 시범사업 운영

2) 역학조사

- 감염병 역학조사 주간보고 발행

- 역학조사 분석 및 자문

- 보건소 역학조사 담당자 교육

- 역학조사 현장지원

3) 취약인구보호

- 서울특별시 HIV 신속검사 사업 지원

에이즈 고위험군 접근법 조사

서울특별시 결핵 민간공공협의회 개최

- 국제교류

4) 역량강화

- 보건소 및 일반인 교육

- 감염병 유관기관 협의체 운영 및 훈련 지원

감염관리 교육 및 자문

- 홈페이지 운영

◦ 기대효과 및 사업활용 전략

- 서울특별시에서 발생한 감염병에 대한 주기적인 감시와 통계를 통한 모니터링으로 감염병에 대한 선제적 파악 및 대응체계 구축으로 감염병 확산 차단

- 역학조사 방법, 의료기관 감염관리를 포함한 감염병 관리 실무자들 대상 교육을 통한 감염병 관리 담당자들의 역량 강화 및 네트워크 내에서의 지속적인 소통 유도

- 감염병 위기상황 시 비상조직으로 전환하여 서울특별시 조직내로 편입하여 분석 및 현장 대응 지원으로 대응 능력 강화

- 홈페이지를 통해 감염병에 대한 올바른 지식의 접근성 제고

- 아시아 대도시 간 네트워크 간 협력으로 감염병 관리에 대한 지식과 경험의 공유

- 감염병에 취약한 인구집단에 대한 감염병 정책을 위한 근거 마련 및 사업 시행

2		검 토 사 항

□ 사업계획 성과지표별 상반기 목표 달성여부 검토

□ 각 사업별 정상 추진여부 확인(부진분야 대책마련)

□ 검토방법 : 각 사업별 업무담당자 검토

3		검 토 결 과

□ 사업계획 성과지표

사업목표	전략□활동	17년 중간보고			비 고
		연간 목표	중간 실적	달성도 (%)
서울특별시의 감염병 감시/통계/분석 업무 지원 및 다발감염병 예방홍보자료 기획	감염병 감시 주간보고 발행	52회	26회	50	발행 및 환류, 게시
	해외 유행감염병 모니터링	30회	46회	153	모니터링, 정보자료 제공 등
	잠정통계 발행 및 자치구별 자문	1회	1회	100	2016년 잠정통계 발행
	감염병 시민소식지 발행	24회	12회	50	소식지 발행, 게시
	감염병 예방홍보자료 기획	3회	3회	100	수족구병 1회 노로바이러스감염증1회 로타바이러스감염증1회
	서울특별시 중증급성호흡기감염증 감시 주간보고 발행	52회	26회	50	발행 및 환류
서울특별시 역학조사 모니터링 및 업무지원	감염병 역학조사 주간보고 발행	52회	26회	50	발행 및 환류, 게시
	수인성식품매개질환 역학조사 자문 및 평가	20회	61회	305	역학조사 자문 35회 역학조사 평가 26회
	보건소 역학조사 담당자 교육	3회	2회	66	이론교육 1회 보호복착탈의 교육 1회
	잠정통계 발행	1회	2회	100	2016년 잠정통계 발행
	집단발생 현장지원	요청시	1회	100	역학조사 현장지원
서울특별시의 에이즈와 결핵 환자 관리방안 도출	서울특별시 보건소 HIV 신속검사 사업 보건소 현장조사	3회	3회	100	현장조사
	서울특별시 HIV 신속검사 사업 시스템 보완	보완	보완	100	상반기 의견 조율 완료 하반기 진행 예정
	에이즈 고위험군 접근법 조사	1회	진행중	30	설문조사 진행 중
	서울특별시 결핵 민간공공협의회 회의 개최	1회	진행중	30	상반기 의견 조율 및 설문조사 진행 중 하반기 개최 예정
서울특별시 및 자치구의 감염병 관련 및 의료기관 감염 관련 담당자의 역량강화	보건소 및 일반인 교육	1회	3회	300	보건소 방역 교육 1회 경찰 기동대 교육 2회
	보건소 감염병조사관 심화교육	2회	4회	200	교육안 자문회의 1회 심화교육 3회
	감염병 유관기관 협의체 운영	2회	1회	50	상반기 협의체 모임 1회
	위기대응 현장 훈련 지원	1회	1회	100	준비 회의 개최 1회 하반기 훈련 시행 예정
	감염관리 교육 및 자문	6회	협의중	10	자문회의 개최 1회 하반기 교육 시행 예정

□ 사업계획 성과지표

-  전반사업 정상추진(부진분야 : 감염관리 교육 및 자문)

□ 각 사업별 정상 추진여부 확인

-  사업별 추진사항 기재 적정성 확인 및 추진 증빙자료 확인

-  부진분야 :  감염관리 교육 및 자문(협조요청 및 차선 대책마련 중)

□ 검토방법 : 각 사업별 업무담당자 검토 완료

- 특이사항 : ‘증증급성호흡기증후군(SARI)’시범사업 지속 추진 사유 기술

※ 시범기간 동안 발생한 문제점을 보완하여 감시자료의 정확도를 높이고, 감시결과의 활용방안을 구체화하기 위해 2017년 말까지 시범기간 연장 운영

□ 사업계획 총평

- 검토결과 전반적으로 정상추진을 보임.

부진분야는 감염관리 교육 및 자문 사업(10%)로 현재 간호조무사회 교육을 위탁받은 병원협회와 지속적인 업무협의를 추진하고 있으나 불가할 경우, 사업변경 등으로 의료기관 담당자의 감염관리 역량강화 모색이 필요함

- 홈페이지 방문자 확대 노력 필요

4		행 정 사 항

□ 중간보고서 제출 : 2017. 7. 25.(화) 질병관리본부 자료제출

□ 검토결과 안내 : 2017. 7. 28.(금) 7월 감염병관리지원단 월례회의시 전달. 끝.