하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	큰빛종합건설(주)(내곡 보금자리주택지구 조성공사 현장대리인)
(경유)

제목	내곡 보금자리주택지구 조성공사 공사기간 연장 검토 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하오며, 우리공사 택지계획부-2973호(2017.07.14.) 및 택지설계부-1985호(2017.07.17.)와 관련입니다.

2. 우리공사와 계약 체결하여 시행중인 내곡 보금자리주택지구 조성공사와 관련, 상위계획인 지구계획의 변경 및 추가 설계 진행 중으로 추가공사가 발생되어 도급계약 공사의 변경이 필요한 실정임을 알려드리오니, 공기연장에 대하여 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 내곡공공주택지구 지구계획 변경 및 설계보완 사항에 대한 추진일정 회신

2. 내곡공공주택지구 지구계획 변경관련 추진일정 조회에 대한 회신.  끝.

	서 울 주 택 도 시 공 사 사 장

부 원						택지조성부장		전결	07/19
		설재훈						박영욱
협조자

시행			택지조성부-3491				(2017.07.19)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울 강남구 개포로 621								/
전화		02)3410-7641			전송	02)3410-7619		/	wogns79@i-sh.co.kr					/	공개