내곡 보금자리주택지구 조성공사 공사기간 연장 사유서

공사개요

○ 공 사 명 : 내곡 보금자리주택지구 조성공사

○ 공사기간 : 2011.11.30. ~ 2017.07.31

○ 도 급 자 : 큰빛종합건설(주) 외 1개사

○ 공 사 비 : 37,238백만원

관련근거

○ 공사계약일반조건 제23조 및 26조

○ 공사계약 특수조건 제14조

○ 내곡지구 개발계획변경 사항에 대한 추진일정 회신[택지계획부-2973호(2017.07.14)]

: 「공공공지 변경 및 보행자도로 개설 등」이 추가 공사 발생 사항이 포함된 지구계획 변경 승인 일정 회신(지구계획 2017.08 고시 예정)

○ 내곡지구 설계보완 사항에 대한 추진일정 회신[택지설계부-3457호(2017.07.17)]

: 「본마을 인도교 추가설치 및 신원천 언더패스구간 설계」현재 하천심의 및 유관기관 협의 등 관련절차 이행 등 일정 회신(설계완료 2017.08말 예정)

○ 시공사 계약변경 및 공사기간 연장요청 문서

준공기한 연기 사유

1. 지구계획 변경로 인한 추가 공사 필요(택지계획부)

○ 현재 추진 중인 유치원3부지 진출입구 및 공공공지 위치변경, 내곡지구와 청룡마을간 연결보행자도로 개설, 지구 외 필지 연결녹지 일부 공공공지 변경에 따른 추가 공사 필요

2. 여의천 본마을 앞 인도교 신설 및 신원천 신원1교 언더패스 설계 중으로 추가 공사 필요(택지설계부)

○ 본마을 주민 민원에 의한 여의천 횡단 인도교 추가 설치 관련 설계 및 신원천 신원1교 하부 통과를 위한 보행자 동선 확보를 위한 설계가 진행 중으로 추가 공사 필요

공사기간연장 검토

○ 검토의견

- 우리공사 사유에 의한 추가 공사 발생으로 도급사의 요청대로 공사기간을 연장하여 추가공사 시행함이 타당할 것으로 사료됨

- 추후 변경설계 완료 이후 추가공사 금액을 산출, 변경계약 추진 예정.

○ 당    초 : 2011.11.30 ～ 2017.07.31

○ 변    경 : 2011.11.30 ～ 2017.12.20 (공기 연장 143일)

※ 공사기간 연장 귀책사유 : 우리공사    ※ 지체상금 : 미부과

조치계획

○ 상기 검토내용과 같이 내곡 보금자리주택지구 조성공사에 대한 공사기간 연장에 대하여 계약변경 추진.

붙임: 1. 시공사 동의서 1부.

2. 예정공정표 1부.  끝.