	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	내곡 보금자리주택지구 조성공사 설계변경(9회) 시행(공사기간 연장)

우리공사에서 시행중인 『내곡 보금자리주택지구 조성공사』의 설계변경(9회)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 내곡 보금자리주택지구 조성공사

○ 계 약 일 : 2011.11.25

○ 준 공 일 : 2017.07.31

○ 도 급 자 : 큰빛종합건설(주) 회 1개사

○ 공 사 비 : 37,238백만원
나. 설계변경 내역

○ 공사비 변경 : 변경없음

○ 공사기간 변경

- 당초 : 2011.11.30. ~ 2017.07.31

- 변경 : 2011.11.30. ~ 2017.12.20.(증 143일)

※ 토목 공정과 연계되는 전기 및 교통신호등공사, 건설폐기물 처리용역 및 지급자재납품계약 등도 변경 공사 기간을 반영하여 계약변경 시행

○ 기간연장 사유 : 붙임자료 참조

○ 공사기간 연장 귀책소재 : 우리공사

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.

붙임  1. 내곡 보금자리주택지구 조성공사 공사기간 연장 사유서

2. 공사기한연기원

3. 내곡 보금자리주택지구 조성공사 공사기간 연장 검토 요청

4. 예정공정표(9회변경)-공기연장 제출용

5. 예정공정표(당초,변경9회변경).  끝.

부 원						파트장				택지조성처장			택지사업본부장		07/24
		설재훈						송치정			박광균			김소겸
협조자	전기공사부장		신명범				파트장	안효승
일 상 감 사	감사실장		심윤수				감사일자 :	2017/07/24		감사일련번호: No.	700		감사의견여부 :	의견없음

시행			택지조성부-3597				(2017.07.24)			접수				()
방침번호
우	135-988			서울 강남구 개포로 621								/
전화		02)3410-7641			전송	02)3410-7619		/	wogns79@i-sh.co.kr					/	공개