＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	용역의 일시정지 해제 요청(서울애니메이션센터 재건축공사 설계용역)

1.서울애니메이션센터 재건축공사 설계용역의 일시정지 요청(문화융합경제과-2041호, ’17.5.25) 및 애니메이션센터 재건축 디자인 보완 시장님 보고(’17. 7.19)와  관련하여, 애니메이션센터의 디자인 보완 내용이 설계에 반영될 수 있도록 설계용역을 추진해 주시기 바랍니다.

가. 해제 요청 개요

1) 용역명 : 서울애니메이션센터 재건축공사 설계용역

2) 계약자 : ㈜공간종합건축사사무소(박윤석)

3) 계약금액 : 2,072백만원(총 사업비48,679백만원)

4) 기존 용역기간 : ’17. 2.24~ ’17.12.20

5) 일시정지 기간 : ’17. 5.26~ ’17.7.24(60일)

6) 재착수일 : ’17. 7.25

붙임 1. 애니메이션센터 재건축 디자인 조감도 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정정은		상상산업팀장	고옥희		문화융합경제과장	07/25 김경탁
협조자
시행	문화융합경제과-4403	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 3층	/
전화	02-2133-2597	/전송	02-2133-1061	/	cceun0916@seoul.go.kr	/	부분공개(5)