시  민

문서번호	급수운영과-17854
보존기간	년
결재일자	2017.7.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	급수운영과장
이일로	07/26 최철민
협 조
	주무관		서장원

설계변경(제1회) 시행 보고

(2016-2차 포장도로 굴착복구공사)

2017. 7. 26.

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경(제1회-최종) 시행 보고

「2016-2차 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사」업무수행 중 현장여건 및 현장에 적합한 시공으로 인한 계약물량이 증․감됨에 따라 아래와 같이 설계변경(제1회-최종)을 시행코자 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2016-2차 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가)

○ 공사기간 : 2017. 3. 13. ~ 2017. 7. 31.

○ 수 급 자 : 태평로건설㈜  대표 류지연

○ 공사개요

구 분	계	아스팔트 포 장	콘크리트 포 장	보도블록 포 장	투수콘 포 장
수 량	124.0a	111.0a	11.0a	1.0a	1.0a

○ 계약금액 : 609,777,180원

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경금액 및 주요 설계변경 사유

○ 설계변경 금액

구 분	계 약 금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
도 급 비	609,777,180	609,422,000	-355,180

○ 주요 설계변경 사유

- 현장에 적합한 시공 등으로 인한 포장복구 계약물량 증 ․ 감 발생

구 분	당 초		변 경		비 고
아스팔트 포장	111.0	a	90.98	a	감)	-20.02	a
콘크리트 포장	11.0	a	2.29	a	감)	-8.71	a
보도블럭 포장	1.0	a	2.44	a	증)	1.44	a
투수콘 포장	1.0	a	0	a	감)	-1.0	a

- 신규공종 추가 : 보조,혼합기층재(소운반6㎞) 15DT(적치장→현장)외 3개소

(부직포철거, 운반, 처리비단가 적용)

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경 계약의뢰 추진

- 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 자체 「설계변경 심의위원회」 사전 심의를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경을 시행(계약금액 조정)코자 함.

※ 근거 : 계약심사과-227(2009.1.20.)호 「’09년 소규모 상수도공사 설계심사 추진계획」

붙 임  1. 설계변경 사전심의 요청서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 사전심의 의결서 1부.  끝.

4. 합의서 1부.  끝.