		서 울 특 별 시 농 수 산 식 품 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사 시행

1. 관련근거

가. 「정책조정회의 사장님 지시사항」(2016.12.19)

나. 「가락몰  지하1층 주차장 환기시설 개선검토 용역추진(안)」(시설안전팀-403,2017.1.19)

다. 「가락몰 지하1층 주차장 환기시설 개선검토 용역결과 송부」(시설안전팀-1882,2017.3.28)

라. 「가락몰 지하1층 주차장 환기시설 개선추진 협조 요청」(시설안전팀-2363,2017.4.18)

2. 가락몰 유통인의 쾌적한 영업환경 조성을 위하여 가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사를 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사

나. 공사개요

○ 청과2,3구역 주차장 및 하역장 덕트제작 및 설치(366㎡)

○ 인라인휀 설치(2EA) 및 이설 설치(1EA)

다. 소요예산 : 57,400,000원(부가세포함)

라. 공사기간 : 계약일로부터 20일

마. 예산과목 : 자본적지출/유형자산/건물/신축매장 시설보완공사

바. 예산현황

(단위: 천원)

예산과목	예산액	배정액	기집행액	금회집행액	예산잔액
신축매장 시설보완공사	2,494,298	816,420	816,420	57,400	1,420,478

사. 계약방법 : 전자공개 수의계약(지역제한,긴급)

아. 입찰자격요건 :

① 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “지방계약법”               이라 함) 시행령 제 13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의                자격요건을 구비하고, 건설산업기본법(이하“건산법”이라 함)에 의한                「기계설비공사업」면허소지자

② ①항 면허를 보유하고 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(7억        이하)에 의거 주된 영업 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

붙   임 :  1. 공사개요 ............................................................. 1부

2. 수의계약사유서 ............................................... 1부

3. 긴급발주사유서 ............................................... 1부

4. 예정공정표 ......................................................... 1부

5. 청렴계약이행 서약서 ..................................... 1부

6. 부당계약조건 발주부서 체크리스트 ....... 1부

7. 설계도서(도면, 내역서, 시방서) ................. 1부(별첨)

8. 주요투자사업 심사서................................................... 1부

9. 일상감사요청서......................................................... 1부. 끝.

★담당자						팀장직무대리				건설안전본부장			사장		05/02
		김세경						김주호			김승호			박현출
협조자	팀장		이니세										감사실	감사실

시행			설비공사팀-411				(2017.05.02)			접수				(2017.05.02)
우	138-701			서울특별시 송파구 양재대로 932								/	http://www.garak.co.kr
전화		02-3435-0303			전송	02-3435-0557		/						/	공개

※ 붙임 1

공 사 개 요

공 사 명 : 가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사

1. 공사 집행 사항

가. 공사내역 및 설치위치

○ 청과2,3구역 주차장 및 하역장 덕트제작 및 설치(366㎡)

○ 인라인휀 설치(2EA) 및 이설 설치(1EA)

나. 책정된  예산액 : 2,294,298천원

다. 예산 배정액    : 816,420천원

라. 기 집행액      : 816,420천원

마. 금회 집행액    :  57,400천원

바. 집행 잔액      :  1,420,478천원

사. 금후 집행계획  :  없음

2. 관급자재내역     : 없음

3. 설계자 소속      : 설비공사팀 직급 4 급   김 세 경

4. 설계 심사자 소속 : 설비공사팀 직급 팀장   김 주 호

5. 감독원 소속      : 설비공사팀 직급 4 급   김 세 경

6. 검사원 소속      : 설비공사팀 직급 팀장   김 주 호

설비공사팀 직급 차장   최 유 식

7. 기성고 지급 회수 : 없음

8. 하자보수 보증금율 및 기간 : 2/100, 2년

9. 지체상금율 : 0.5/1000

※ 붙임 2

수 의 계 약 사 유 서

계약건명	가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사
소요예산	\57,400,000원(부가세 포함)
계약업체	전자공개수의계약
관련근거	○ 관련법령 - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 제5호 - 공사 회계규정 제238조 5호(수의계약에 의할 수 있는 경우) ○ 세부내용 - 「건설산업기본법」에 따른 종합공사의 경우 추정가격이 2억원(「건 설산업기본법」에 따른 전문공사의 경우에는 1억원, 「전기공사업 법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사 또는 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 그 밖에 공사 관 련 법령에 따른 공사의 경우에는 8천만원) 이하인 공사, 추정가격 (임차나 임대의 경우에는 연액 또는 총액기준)이 5천만원 이하인 물 품의 제조·구매·용역 계약 또는 그 밖의 계약의 경우
수의계약 사유	○ 본 계약 건은 소요금액이 오천칠백사십만원으로(전문공사 1억원 이하 공사) 우리 공사 회계 규정 제238조 제5호에 의거한 수의계약에 의할 수 있는 금액으로 전자공개 수의계약을 요청함
우선구매 해당사항 (모두선택)	□중소기업제품 □사회적기업제품 □중증장애인생산제품 □여성기업제품 □친환경상품 □신기술제품 □기술개발제품 ■해당없음

2017.  05.

작성자 :  설비공사팀  4급   성명  김 세경

확인자 :  설비공사팀  팀장  성명  김 주호

※ 붙임 3

긴 급 발 주 사 유 서

□ 공사명 : 가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사

1. 본 공사는 가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사로써 본 공사의 공사기간(20일)을 고려하고, 가락몰 지하1층 주차장 환기시설을 신속히 보완하기 위하여 긴급으로 공사를 발주하고자 함.

2017. 5

작 성 자 : 설비공사팀     4 급 김 세 경

확 인 자 : 설비공사팀     팀장 김 주 호

※ 붙임 4

예 정 공 정 표

○ 공 사 명 : 가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사

○ 공사기간 : 계약일로 부터 20일간

○ 공 정 표

구 분	계약일로부터의 일정
	3	7	10	14	17	20
현장확인 및 자재반입
청과2구역 덕트 설치
청과3구역 덕트 설치
청과2,3구역 휀 설치
시운전 및 준공

※ 붙임 5

서울시농수산식품공사 청렴계약 이행서약서

서울시농수산식품공사에서는 부패 없는 투명한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 유리알처럼 맑고 깨끗한 시정을 구현하고자 가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사에 청렴계약제를 시행합니다.

우리 공사 위 (공사, 용역, 물품구매) 입찰, 계약, 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계되는 모든 임직원은 관계법령에 규정된 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 실시간으로 공개하고 시민감사옴부즈만 및 시민참여옴부즈만 활동에 적극 협조하겠습니다.

내부비리제보자에 대하여는 어떠한 불이익 처분도 하지 않겠습니다.

입찰, 계약 및 계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관련 임직원들은 이유여하를 막론하고 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 요구하지 않고, 받지 않도록 하겠으며, 이를 위반할 시에는 징계 등 관계법에 따라 책임질 것을 서약합니다.

【 시민감사옴부즈만 연락처 】

∙ 사 무 실 : ☎ (02) 6360-4881~2

FAX     6360-4908

2017.  05.

서울시농수산식품공사 사장   박 현 출(서명 또는 날인)

(계약부서)    경영본부장   서 강 석 (서명 또는 날인)

팀장   김 진 중 (서명 또는 날인)

담당   우 재 수 (서명 또는 날인)

(발주부서)  현대화본부장   김 승 호 (서명 또는 날인)

팀장   김 주 호 (서명 또는 날인)

담당   김 세 경 (서명 또는 날인)

※ 붙임 6

「부당계약특수조건」발주부서 체크리스트

사 업 명	가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사
발주부서	부서명	설비공사팀	작성자	김세경	연락처	3435-0303
계약부서	부서명	재무팀	작성자	우재수	연락처	3435-0381
제출일자	2017. 05

연번	부당계약특수조건 점검사항	해당유무
		발주	계약
1	과업지시서, 계약특수조건 등 계약서류에 갑을(甲乙)용어 대신 공사를 ‘발주부서’로 계약업체를 ‘계약상대자’로 표기했는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
2	과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 협의절차 또는 분쟁 처리절차 없이 발주부서의 의견에 따른다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
3	과업 수행 중 계약 내용 변경사유 발생시(물량증감, 물가상승 등) 계약금액 조정 협의를 제한하는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
4	과업지시서, 특수조건 등 계약서 부속서류상에 기재하지 않은 내용에 대해 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
5	계약기간 이후에 발주부서가 계약상대자에게 추가적인 과업지시를 할 수 있다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
6	포괄적·불명확한 사유에 의해 계약해지가 가능하다고 명시한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
7	과업 내용에 ‘그 밖에 발주부서가 요구하는 사항’ 등 포괄적인 과업지시를 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
8	계약진행 중 문제가 발생하였을 시 책임소재 구분 없이 계약상대자가 모든 책임을 지도록 한다는 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
9	계약 체결시 산출내역서 상 명시되지 않은 비용에 대해 계약상대자가 부담하도록 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□
10	(협상계약) 제안서평가위원회 평가결과(평가점수, 평가위원 명단)를 공개하지 않는다고 한 내용은 없는가?	Y/N ■□	Y/N ■□

※ 붙임 8

# 붙임 9

일상감사 요청서

건 명	가락몰 지하1층 주차장 환기시설 보완공사
1. 사업개요 ○ 사업근거 가. 「정책조정회의 사장님 지시사항」(2016.12.19) 나. 「가락몰 지하1층 주차장 환기시설 개선검토 용역추진(안)」(시설안전팀-403,2017.1.19) 다. 「가락몰 지하1층 주차장 환기시설 개선검토 용역결과 송부」(시설안전팀-1882,2017.3.28) 라. 「가락몰 지하1층 주차장 환기시설 개선추진 협조 요청」(시설안전팀-2363,2017.4.18) ○ 사업내용 가. 청과2,3구역 주차장 및 하역장 덕트제작 및 설치(366㎡) 나. 인라인휀 설치(2EA) 및 이설 설치(1EA) ○ 사업기간 : 계약일로부터 20일 ○ 사업비 : 57,400,000원
2. 자체 검토의견 가. 사업의 추진배경 ○ 가락몰 영업환경 개선을 위한 시설보완 계획 내용 검토 - 가락몰 상인(청과직판)의 불편사항 개선 추진 나. 사업의 필요성 ○ 판매동 내 임대유통인 영업환경 개선 다. 사업의 적정성(관련규정 검토) ○ 설계용역 시행 및 기획팀 사전심사 라. 기대되는 효과 ○ 가락몰을 이용하는 임대유통인의 영업환경 불편사항 개선