투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	중구 퇴계로 36가길104 ㈜공간종합건축사사무소 대표 박윤석귀하
(경유)
제목	설계용역 일시정지 해제 알림

1. 문화융합경제과-4403(2017.07.25)호 및 건축부-9039(2017.05.26)호와 관련입니다.

2. 서울애니메이션 재건축 설계용역은 사업의뢰부서(문화융합경제과)의 설계용역 일시정지 해제를 알려드리오니 업무를 재개하시기 바라며, 시장보고(‘17.07.19)시 보고된 디자인 보완내용(조감도)은 설계에 적극 반영되도록 조치하시기 바랍니다.

가. 설게용역 업무 일시정지 해제개요

1) 용 역 명 : 서울애니메이션센터 재건축공사 설계용역

2) 용 역 자 : ㈜ 공간종합건축사사무소 대표 박윤석

3) 용역기간 : 2017. 2.24 ~ 2017.12.20

4) 일시정지 기간 : 2017. 5.26~ 2017. 7.24(60일)

5) 재착수일 : 2017. 7.25

따로붙임 1. 애니메이션센터 재건축 디자인 조감도 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		건축총괄과장	代김찬유		건축부장	07/28 김진용
협조자
시행	건축부-13159	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2608	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)