문서번호	의정담당관-8563
결재일자	2017.8.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관
박명수	권태섭	08/01 전명수

「의원회관 노후 간선로 보수공사 준공 대비」

설계변경(정산) 계획 보고

2017. 8.

서울특별시의회

[의정담당관]

「의원회관 노후 간선로 보수공사 준공 대비」

설계변경(정산) 계획 보고

「의원회관 노후 간선로 보수공사」준공에 앞서 시공 여건 변화에 따른 물량 증감과 보험료 등 사후정산을 위한 설계변경을 시행코자 함.

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 의원회관 노후 간선로 보수공사

❍ 사 업 비 : 금64,834,350원

❍ 사업기간 : ‘17. 5. 25. ~ ’17. 8. 22.

❍ 사업내용

- 노후 분전반 교체 및 이설 5면(지하1층~4층)

- 간선 케이블 포설 260m(지하1층 전기실~1, 3층 분전반)

- 승강기 에어컨 설치 2대

❍ 시 공 사: (주)지에스아이앤티

□ 추진경위

❍ 2017.  5.  10.  - 공사 발주

❍ 2017.  5.  25.  - 계약 및 착공

❍ 2017.  7.  31.  - 공사 추진 중(공정률 95%)

□	설계변경(정산) 총괄 (감 4,180천원)

(단위 : 원)

구 분	당초 계약금액	변경(정산)금액	증감액	비 고
총공사비	64,834,350	60,654,000	- 4,180,350	변경(정산) 내역서 별첨
공급가액	58,940,318	55,140,000	- 3,800,318
부 가 세	5,894,032	5,514,000	- 380,032

※ 총공사비 기준

□	세부 변경 내역

❍ 배전반/분전반 분기회로 변경에 따른 물량 증감

명 칭	규 격	분기회로 증감(회로)			케이블 증감(m)			증감액(원) (직접공사비)
		당초	변경	증감	당초	변경	증감
계								- 2,403,960
L2-B1 (지하1층)	F-CV 4㎟/2C	16	18	2	160	180	20	85,929
L2-1 (1층)	“	12	17	5	144	204	60	257,785
L2-2 (2층)	“	20	22	2	200	220	20	85,929
LV-1,2 (전기실)	F-CV 16㎟/4C	4	2	- 2	260	133	-127	- 2,833,603

분전반 분기회로 증가(예)

배전반(LV-1 ,2)～분전반 간 분기회로 감소

- 범  례 -

		:	기존			:	철거			:	신설

L2-3(16회로 → 18회로)

당초(4회로 260m 신설)

변경(2회로 133m 신설)

❍ 보험료 및 안전관리비 사후정산

- 근    거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제8절(보험료 사후정산 등)

(단위 : 원)

구 분	계약금액	변경(정산)금액	증감액
계	4,209,613	3,057,791	- 1,151,822
산재보험료	971,321	906,466	- 64,855
고용보험료	216,679	202,211	- 14,468
건강보험료	385,958	0	- 385,958
연금보험료	565,315	0	- 565,315
노인장기요양보험료	25,280	0	- 25280
산업안전보건관리비	1,508,270	1,437,834	- 70,436
기타경비	536,790	511,280	-25,510

□	향후일정

❍ 2017. 8.  1. - 설계변경(정산) 시행

❍ 2017. 8.  3. - 계약금액 변경계약 체결

❍ 2017. 8.  7. - 공사 준공

따로붙임: 1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 고용/산재보험 가입 증명원 1부.

3. 안전관리비 사용 내역 1부.

4. 설계변경(정산) 동의서 1부. 끝.