소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-4067				담당자	전산운영팀장	전산통신과장	결재
				정석희	代배미순	08/07 정문수
공정 내용	진척공정	31 %	진척주요추진사항
	금주공정	5 %	금주주요추진사항	서버 S/W설치, DB 마이그레이션 진행
금주 설치 작업 내용 o 통합서버 M10-4 DB1/DB2, HP RX2660, T4-1 운영DB 데이터 TEST장비로 데이터 마이그레이션 TEST 진행 o 임대 스토리지 / SAN스위치 입고 설치진행, 스토리지 구성 및 SAN 조닝 설정, 할당한 볼륨 통합서버 M10-4에서 연결작업 진행 o 네트워크 케이블 포설작업 진행 o 통합서버 M10-4 DB1 / DB2 Oracle DB 10g 설치 o 신규GIS서버 ArcGIS에서 요청한 Framework 4.5이상 버전 설치요청으로 Windows update으로 작업진행 o 통합서버 WAS1/WAS2 Veritas 공유파일시스템 설치진행
금주 투입 인원 o 전산운영팀 : 소방장 정석희 o ㈜디엠아이시스템즈 : 이광용차장, 정연권차장, 김태진대리, 이준원 과장, 최명식 팀장, 최홍석 차장, 황두현 대리, 최인범 대리, 천영권 차장, 이영수 과장, 임강훈 차장 o 유지보수팀 : 송은석PM, 김민호 과장, 김강태 과장
현장대리인에게 지시사항
특기사항