문서번호	의정담당관-8915
결재일자	2017.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관
김정수	권태섭	전결 08/08 전명수

- 서울시의회 본관 및 부속동 -

정밀안전진단 및 내진성능평가 진행사항 보고

2017. 08.

서울특별시의회사무처

(의정담당관)

- 서울시의회 본관 및 부속동 -

정밀안전진단 및 내진성능평가 진행사항 보고

「세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업」관련하여 서울시의회 본관 및 부속동에 대한 안전문제가 제기되어 “정밀안전진단 및 내진성능평가”를 요청하여 ‘17. 08월 현재 주요 진행사항을 보고드림.

Ⅰ		추진 경위

❍ 2017. 3.15. : 시의회 긴급회의 실시 (공사 안전성 확보 방안 요청)

❍ 2017. 3.31. / 4.11. / 4.26. : 안전진단 결과 전문가 자문회의 실시

❍ 2017. 6. ~  9.(예정) : 진단결과 보수·보강이 필요한 부속동 4층 공사

❍ 2017. 5. ~ 10.(예정) : 정밀안전진단 및 내진성능평가 완료

Ⅱ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 서울시의회사무처(본관 및 부속동) 내진성능평가 용역

❍ 용역기간 : 2017. 04. ~ 10.

❍ 과업내용

· 시설물 구조해석 및 사용성 평가를 통한 내진성능평가 실시

· 내진보강방안(기본설계안, 공법제시 등) 및 유지관리 방안 제시

❍ 용 역 비 : 금85,000천원

❍ 진단업체 : 사림엔지니어링 대표 한용섭

❍ 대    상 : 서울시의회 본관 및 부속동

시 설 명	연 면 적	구 조	규 모	준공연도
의회본관	7,175㎡	철근콘크리트조 등	지하1층, 지상3 타워5층, 부속동 4층	1935년

※ 의원회관 및 서소문 별관(2동) 건축물은 진행 중에 있으며‘17년 10월 완료 예정

Ⅲ		주요 보고내용

❍ 정밀안전진단 중간 점검결과

- 부속동 4층의 경우 안전등급 “D등급”으로 즉시 보수보강 필요함

❍ 시의회 부속동 4층 부분 보수(보강) 방안 제시

- 부속동 4층 천정 목재 보강 및 내부 마감재 보수

- 공사장 저진동 천공장비로 공법 변경하여 진동 영향 최소화

- 공사장 흙막이공법 변경(CIP) 및 지반보강(SGR) 등 건축물 안정성 확보

- 의회 불편 최소화를 위한 공사장 소음방지 조치 및 계측관리 추가 실시

❍ 본관 1층 로비 벽면 녹화 조성 관련 사항

- 본관 로비 상부 벽면은 조적벽돌로 시공되어 있어 앙카볼트 등 타공시 균열 우려 있음

- 1층 기둥 벽체 등 녹화 조성시 장비를 가지고 철근 매립 위치를 확인하여 앙카            볼트 시공하여야 하며 녹화설치시 하중 등 구조안전을 확인하여야 함

Ⅳ		향후 계획

❍ ‘17. 10월 : 부속동 4층 보강공사 완료 후 정밀안전진단 (재)점검

- 부속동 4층 공사 완료 후 재점검 실시 안전등급 확인

❍ ‘17. 10월 : 내진성능·사용성평가 등 방안 제시 등

- 내진보강 방안 등 제시 및 건축물 안정성 확보. 끝.