				★대리			팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호		도로관리처-6015
보존기간		준영구		협 조
결재일자		2017.07.21.
공개여부		공개
2017년 자동차전용도로 노면표시 유지보수공사 낙찰차액 사용계획 보고
			2017. 07.
						도로관리처

『2017년 자동차전용도로 노면표시 유지보수공사』

낙찰차액 사용계획 보고

공사, 자재 발주에 따른 낙찰차액을 활용하여 노면표시 노후구간을 추가 정비하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공코자 함.

Ⅰ	예산잔액(낙찰차액) 발생 현황

□ 사업명 : 2017년 자동차전용도로 노면표시 유지보수공사

□ 발주 및 예산잔액(낙찰차액)

(단위:천원)

구 분	사업비	발주금액	계약금액	예산잔액 (낙찰차액)
계	676,930	676,930	593,741	83,189
공 사	-	429,930	372,113	57,817
자 재	-	247,000	221,628	25,372

※ 민간대행사업비 : 우리은행 1005-303-160310

□ 정비 현황

○ 추진실적

구 분	계 약 수 량	완 료 수 량	잔 여 수 량	비 고
차 선 도 색	264,000m	127,111m	136,889m	공정율 50%

- 2017. 2. 20 : 공사 발주

- 2017. 3. 28 : 공사 착공

-     ~ 7. 15 : 노면표시공사 공정률 50%

Ⅱ	낙찰차액 사용 사유

□ 당초 계획된 정비구간 외 추가 구간 발생

○ 교통안전시설 개선설치 통보

- 서부간선로(성산 → 목동교 방향) 성산대교 남단 안전지대 및 진로변경 제한선 개선 [교통관리과-5671(‘17.03.03)]

- 동부간선로 성수방향(월릉, 중랑, 장안) 3개소 외 7개소 끼어들기 단속 및 예방을 위한 노면표시 개선[교통관리과--5648(‘17.03.03)]

- 올림픽대로 공항방향 청담1교, 청담2교 2개소 외 6개소 노면표시 신설·제거 [교통관리과-6000(2017.03.07)]

- 올림픽대로(공항방면) 당산철교 주변 노면표시 개선[교통관리과-8652(‘17.04.03)]

- 잠실대교 남단, 동부간선로(청담방향) 강일IC 및 공항방면 2개 진출로, 동부간선로 성동교 하부 노면표시 개선[교통관리과-16053(‘17.06.13)]

- 올림픽대로 공항방향(영동대교 → 성수대교 간) 4, 5차로 노면표시 개선[교통관리과-19642(‘17.07.13)]

○ 서울경찰청 등 관계기관의 추가적 교통안전시설 요구 및 취약구간에 대한 정비 시행 예정

□ 중앙분리대 백색실선 확대설치 요청

○ 자동차전용도로 중앙분리대 황색실선구간을 백색실선으로 변경 요청

- 경찰청 노면표시 시인성 제고를 위한 중앙분리대 백색실선 확대 계획[교통운영-2528(‘16.11.28)]

- 자동차전용도로 165㎞ 대부분의 구간이 해당됨에 따라 예산범위 내 순차적 정비 시행(운전자 혼란 예방을 위하여 노선 단위 변경 필요)

□ 각 노선별 취약구간에 대한 추가정비 시행

○ 노후 노면표시 구간단위 재도색 시행

- 올림픽대로(공항방향) 강일IC ~ 청담대교 구간

- 올림픽대로(강일방향) 구리암사대교 ~ 강일IC

올림픽대로(공항방향) 강일IC ~ 청담대교	올림픽대로(강일방면) 구리암사대교 ~ 강일IC	동부간선로(성수방향) 상계 ~ 노원지하차도

Ⅲ	행 정 사 항

□ 당초 계획된 정비구간의 잔여 물량은 지속 시행하고, 낙찰차액을 사용하여 노선별 취약구간 및 규제심의 사항 등 추가 정비 시행

□ 예산잔액(낙찰차액)을 포함하여 설계변경 시행

○ 개략 설계변경(안)

구 분	사업비	계약금액	변경금액(안)	증․감
계	676,930	593,741	676,930	83,189
공 사	-	372,113	429,930	57,817
자 재	-	221,628	247,000	25,372

- 관급자재는 납품업체 협의 후 총무처에 변경 구매계약 의뢰

○ 민원 등 원할한 공사 시행 위하여 도급업체에 우선 작업지시 시행

(낙찰차액 내에서 도급비+관급자재비 사용).  끝.