함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	암사아리수정수센터소장
(경유)
제목	취송수펌프 축정렬 진단일정 통보

1. 기술진단과-738(2014.2.12.)호와 관련입니다.

2. 수도시설 기술진단(축정렬) 세부일정을 아래와 같이 알려드리니, 기술진단업무가 원할히 진행될수 있도록 협조하여주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 취·송수펌프 (35대)

대 상	일 정	진단내용	진단방법	비 고
1정수장 송수펌프	4.28~5.2	축정열 상태 측정	운휴설비부터 순차적 시행	진단시 펌프 교대운전
2정수장 송수펌프	5.7~5.9
1취수장 취수펌프	5.12~5.16
2취수장 취수펌프	5.19~5.22

나. 협조사항

- 커플링 보호망을 기술진단 전일까지 분해시행.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정종영		기술진단과장	04/15 김영진
협조자	주무관	전종원
시행	기술진단과-2081	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동 27-1) 상수도사업본부 3층 생산부 기술진단과	/	http://water.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개