투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(동부간선도로확장 3공 전기공사 6차)

우리 본부에서 시행 중인「동부간선도로확장(3공구) 전기공사 6차」와 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기코자 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동부간선도로확장(3공구) 전기공사 6차

나. 계 약 자 : (주)정등전력  대표 김병갑

다. 계약변경 내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고(증,감)
총차	도급비	1,672,109,000	1,672,109,000	변경없음
	공사기간	2008.06.26. ~2017.12.31	2008.06.26. ~2017.12.31.	변경없음
6차	도급비	511,467,000	511,467,000	변경없음
	공사기간	2016.01.22. ~2017.05.31	2016.01.22. ~2017.06.30	연장 30일

라. 예산과목 : (광역교통시설특별회계)도로건설, 광역도로건설, 동부간선 도로확장(녹천교~의정부시계), 시설비및부대비, 시설비

마. 변경사유 : 장암지하차도 수방대비를 위해 수전반 전력선 인입작업을 위해 전기공사 기간 연장

붙임 : 1. 공사연기 보고서 1부.

2. 합의서 및 각서, 공사예정공정표  각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	백남진		시책사업과장	임현근		설비부장	전결 05/26 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-8808	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8648	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개

	설비부장
주무관	백남진		시책사업과장	임현근		설비부장	전결 05/26 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-8808	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8648	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개