문서번호	방재시설부-9058
결재일자	2017.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송영배		조성만	05/26 남궁용
협조

“잠원2빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역”

감리원 투입계획 조정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

“잠원2빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역”

감리원 투입계획 조정 검토보고

잠원2빗물펌프장 신설공사(자연방류관로)와 병행 시공중인 강남역 역경사관로 개선공사의 추진 공정에 맞추어 감리원 투입기간의 변경에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 잠원2감 2017-173(‘17.5.24.) : 감리원 투입계획 조정에 따른 책임감리용역 변경 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역

○ 총용역비 및 용역기간                                 (단위 : 천원)

구 분	총 차 분	1차분(준공)	2차분(준공)	3차분(금회)
총용역비	1,741,000	844,800	80,000	816,200
용역기간	`13.04.01.~ `17.07.31.	`13.04.01.~ `14.12.31.	`15.01.01.~ `15.11.19.	`15.11.20.~ `17.07.31.

○ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사외 2개사

□ 보고내용

○ 잠원2빗물펌프장 신설공사(자연방류관로)와 병행 시공중인 강남역 역경사관로

개선공사 추진공정에 맞게 원활한 감리업무를 수행하기 위해 감리원 투입기간       변경이 필요한 실정임.

○ 분야별 감리원 투입기간 변경 사유

구 분	변 경 사 유	변경 투입기간	비고
보조감리원 (토목)	- 강남역 역경사관로를 우기 전 하수암거 부설 완료에 따른 주·야간공사(가시설, 하수암거, 구조물 철거, 엘리베이터 및 에스컬레이터 구조물시공)병행 시공으로 투입인력 증가 - 잠원2빗물펌프장 준공에 따른 준공업무(인수인계, 서류작성 등) 처리를 위한 보조감리원 연장 투입	(증)1.52개월	잠원 · 강남

구 분	변 경 사 유	변경 투입기간	비고
보조감리원 (조경)	- 제내지 시설녹지 조성 공사기간 감소로 감리원 투입기간 변경	(감)0.03개월	잠원
보조감리원 (기계)	- 잠원 가동보 설치 및 강남역 엘리베이터, 에스컬레이터, 지하상가 기계설비 공사기간 증가로 감리원 투입기간 변경	(증)1.13개월	잠원 · 강남
보조감리원 (소방)	- 강남역 소방공사는 강남소방서에 감리원 배치 여부 확인 결과 배치가 불필요하여 감리원 배제	(감)1.36개월	강남
보조감리원 (전기)	- 가동보 및 옥외 보안등 설치기간 감소로 감리원 투입기간 변경 - 강남역 한전고압선 이설, 기존라인 철거, 전기실 배관·배선 등 공사기간 감소로 감리원 투입기간 변경	(감)1.26개월	잠원 · 강남

○ 용역 변경내역(용역비 변경없음)

구 분	책임감리용역 (3차분)		비고
	당 초	변 경
용역기간	‘15.11.20. ∼ ’17.07.31.	‘15.11.20. ∼ ’17.07.31.
감 리 원 투입계획 변 경 (인.월)	합 계 73.41인.월 1) 책임감리 24.78인.월 2) 보조감리 37.62인.월 - 토목 : 24.92인.월 - 조경 : 2.89인.월 - 기계 : 4.55인.월 - 소방 : 1.12인.월 - 전기 : 4.14인.월 3) 기술지원감리원 11.01인.월	합 계 73.41인.월 1) 책임감리 24.78인.월 2) 보조감리 37.62인.월 - 토목 : 26.18인.월 - 조경 : 2.87인.월 - 기계 : 5.48인.월 - 소방 : 0.00인.월 - 전기 : 3.09인.월 3) 기술지원감리원 11.01인.월
용 역 비	816백만원	816백만원

○ 감리원 투입계획(3차)

□ 검토의견

○ 잠원2빗물펌프장 신설공사(자연방류관로)와 병행 시공중인 강남역 역경사관로       개선공사 현장 실정에 맞는 공사기간으로 감리원 투입기간을 변경함이 원활한       감리업무 수행을 위해 타당할 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 상기 검토 의견과 같이 실정보고 사항을 승인처리하고 추후 설계변경하고자 함.

붙임  감리원 투입계획 조정에 따른 책임감리용역 변경보고 1부.  끝.