문서번호	정보기획담당관-13678
결재일자	2017.8.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		IT투자심사팀장	정보기획담당관
김경숙		代김경숙	08/23 이기완
협조

『서울시 정보시스템 운영 성과관리 체계개선 IT컨설팅 용역』

추진현황보고(주간11~13주차)

2017. 8.

정보기획담당관

『서울시 정보시스템 운영 성과관리 체계개선 IT컨설팅 용역』

추진현황보고(주간11~13주차)

『서울시 정보시스템 운영 성과관리 체계개선 IT컨설팅 용역』사업 11~12주차 추진 현황을 아래와 같이 보고드림

▢ 사 업 명 : 서울시 정보시스템 운영 성과관리 체계개선 IT컨설팅 용역

▢ 추진기간 : 2017.08.02.~08.22.(11~13주차/전체22주)

▢ 사 업 자 : ㈜케이씨에이

▢ 추진실적

번호	작업 구분명	추진기간	단계	비중	금주달성율		전체 진척율
					계획	실적
1	프로젝트 착수	2017. 5.24.∼ 6. 7.	착수	****	****	****	****
2	환경분석	2017. 6. 8.∼ 7. 5.	분석	*****	*****	****	*****
3	현황분석	2017. 7. 6.∼ 9. 6.	분석	*****	****	****	*****
4	개선방안 도출	2017. 9. 7∼ 9.27.	도출	*****	-	-	-
5	이행계획 수립	2017. 9.28.∼10.18.	수립	****	-	-	-
6	완료보고서 작성	2017.10.16.∼10.24.	작성	****	-	-	-

- 업무 및 정보시스템 분석, 선진사례 분석, 차이분석(계속)

- 중간보고 및 2차 전문가 자문회의 개최 : 2017.8.8.(화)

▢ 차주계획

- 현황분석 산출물 검토 및 보완

·현행 프로세스 맵 및 기술서, 정보시스템 현황분석서, 선진사례 분석서, 차이분석서

- 개선방안 수립

·정보시스템 운영 성과측정 및 관리(성과지표 설정기준, 운영성과 측정체계)

·정보화사업 투자심사(정보화 투자관리 체계)

[붙임1] 주간업무현황보고서(11주차) 1부.

[붙임2] 주간업무현황보고서(12~13주차) 1부.

[붙임3] 중간보고서 1부.  끝.