건축공사 시방서

(가락몰 주차장 누수균열 보수공사)

2017년 8월

제1장 공사개요

1. 공사명 : 가락몰 주차장 누수균열 보수공사

2. 위  치 : 서울특별시 송파구 가락동 600번지 가락시장 가락몰

3. 목  적 : 건물누수 방지

4. 공사기간 : 착공일로부터 25일간

5. 공사개요 : 누수균열보수, 배면방수

6. 공사내용

① 아크릴수지 배면 주입 272㎡

② 우레탄 누수균열 주입 62m

제2장 일반시방서

1.1 총   칙

1) 본 공사는 본 시방서 및 다음에 열거하는 정부 제정 각종 표준시방서와 본 공사에 관련되는 각종 재료 시험기준 및 한국산업규격등의 관계 조항에 따라 시행한다.

2) 토목공사, 건축공사 일반표준시방서

3) 콘크리트 및 유지관리 시방서

4) 기타 본 공사에 관련되는 정부발행 각종 기준 및 관계법규 등

1.2 시공계획서 및 예정공정표 제출

1) 수급자는 착수와 동시에 착공계(현장조직, 장비 및 인력투입계획, 경력증명서 포함), 현장대리인계, 안전관리 책임자 선정계를 제출하여야 하며, 다음 사항이 포함된 공사수행 계획서를 제출하여야 한다.

① 공사 수행계획서

◦ 현장 대리인계

◦ 예정공정표

◦ 착공 전 공사현장 전경 사진

◦ 안전관리 책임자 선정계 및 계획서

◦ 기타 수급자가 감독원에 제출할 서류

② 기타 발주자의 규정에 따라 요구하는 제반서류

2) 수급자는 예정공정표, 공사시행 순서 및 공법, 건설장비 동원에 대해 감독원과 협의하여야 한다.

1.3 설계도서

1) 수급자는 본 설계도서의 제반 내용을 숙지하여야 하며, 설계도서의 이해 부족으로 발생하는 불이익은 수급자의 책임이다.

2) 본 시방서와 설계도서간의 내용은 상호 보완 효과를 가지며 어느 한 곳에만 명시되어 있더라도 양쪽에 명시된 것과 같으며 내용이 서로 다를 경우에는 감독원의 유권 해석이 없는 한 시방서의 규정이 우선한다.

3) 본 설계도서에는 누락되어 있을지라도 시공 상 당연히 필요하다고 인정하는 경미한 사항은 수급자 부담으로 시행하여야한다.

4) 설계도서에 표시된 모든 구조물의 형상 및 치수는 완성된 후 준공검사 당시의 형상과 치수를 나타낸다.

1.4 공사용 자재

1) 공사용 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 규격, 품질 및 치수의 것이라야 하며, 모든 자재는 사전에 재료설명서 및 시험 성과품 등의 품질확인 서류를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 수급자는 감독원의 승인을 받은 자재에 한해서만 공사현장에 반입하여야 하며, 반입 시 마다 감독원의 검사를 받아 사용하고 불합격 판정을 받은 자재는 지체 없이 공사현장 밖으로 반출하여야 한다.

1.5 건설 장비

1) 수급자는 현장에 반입, 공사에 투입될 장비의 성능을 판단할 수 있는 제원 및 수량을 서면으로 감독원에게 제출하여야 한다.

2) 수급자는 투입된 장비의 고장, 수리 등에 대하여 예비부품을 일정량 이상 확보해 두어야 하며, 투입장비의 잦은 고장 등으로 건설공기에 지장이 있을 시는 즉시 반출하고 새로운 장비로 대체하여야 한다.

1.6 품질 및 시공관리 시험

1) 시공 관리를 위한 제반 시료의 채취 및 시험은 품질 및 시공관리시험 관계규정에 의거 감독원 입회하에 수급자가 시행하고, 시험성과를 제출하여야 한다. 시험 또는 검사결과 제반 규정에 의해 감독원이 부적합하다는 통지가 있을 경우 수급자는 그 상태를 시정한 후 그에 따른 시험성과표를 제출 하여야 한다.

2) 수급자는 감독원이 필요하다고 인정한 시험에 대하여는 수급자 부담으로 실시하여야 한다.

3) 공사현장에서 시험할 수 없는 종목은 감독원이 인정하는 공신력 있는 연구소 또는 시험소에 의뢰하여 시행한다.

1.7 현장대리인 및 현장종업원

1) 현장 대리인은 공사기간 동안 현장에 상주하여 시공에 관한 제반사항에 대하여 감독원과 협의하여야 하며, 부득이 현장을 이탈하게 될 경우에는 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2) 모든 현장종사원은 신원이 확실한 자로서 업무에 관한 감독원의 정당한 지시에 순응하여야 한다.

3) 감독원은 현장대리인을 포함한 수급자의 현장 종사원에 대하여 공사현장에 부적합 하다고 인정하거나, 감독업무 수행에 방해가 된다고 인정할 때 당해 종사원의 교체를 지시할 수 있고, 수급자는 이를 즉시 시행하여야 한다.

4) 수급자는 현장 종사원이 공․사유물에 피해를 주었을 경우 이에 대한 보상책임을 진다.

5) 안전 및 품질관리 책임자는 관계법령에 의한 유자격자를 공사 기간 중 현장에 상주하여 공사현장의 안전 및 품질관리 책임을 진다.

1.8 공사장 안전관리 및 안전교육

1) 수급자는 본 공사 시행중 작업원의 산업재해 예방과 건강관리를 위하여 노동법, 산업안전 보건법, 동법시행령 및 시행규칙과 발주자의 안전관리 규정을 준수하여 위해방지에 만반의 조치를 취하여야 한다.

2) 수급자는 공사현장에서의 사고 방지를 위하여 감독원과 협의하여 차량 또는 사람의 통행에 위험을 초래할 수 있는 곳에는 울타리 등 위험표지를 설치하고 사고를 미연에 방지할 수 있는 조치를 취하여야 한다.

3) 수급자는 작업하는 종사원에게는 필히 안전모와 안전화 등의 안전용구를 착용케 하고 작업해야 한다.

4) 공사시공에 영향을 미치는 사고, 인명 피해를 일으킨 사고, 또는 제 삼자에게 손해를 끼친 사고가 발생하였을 때에는 적절한  조치를 취함과 동시에 지체 없이 그 상황을 감독원에게 보고하여야 한다.

5) 이외에 안전관리에 대하여는 건설기술관리법에 의한 안전관리 관련 각 해당사항을 준수하여야 한다.

6) 수급자는 작업하는 종사원에게 반드시 안전하게 작업을 수행할 수 있도록 안전교육을 해야 한다.

1.9 현장 관리

1) 수급자는 착수와 동시 감독원과 협의하여 일반 통행인이 쉽게 볼 수 있는 장소에 공사 안내판을 설치하여야 한다.

2) 수급자는 공사의 전부 또는 일부가 완성되어 계속되는 작업이 없는 곳은 현장을 청소하여 깨끗이 유지하여야 한다.

1.10 환경 관리

1) 수급자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고, 시공에 의한 장비 등의 소음 및 분진으로 공중에 피해가 없도록 유의해야 한다.

2) 수급자는 공사 시행중 환경 보전에 관한 관계법령을 준수하여야 하며, 유류, 쓰레기 등 폐기물을 수거하여 관계규정에 의거 처리 해야 한다.

1.11 특허권의리 사용

공사시행에 있어 특허권, 기타 제 삼자의 권리의 대상으로 되어있는 시공방법 및 재료 등을 사용할 때에는 수급자는 그의 사용에 대한 일체의 책임을 진다.

1.12 사고의 처리

1) 공사 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 인명의 손상 또는 제 삼자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 그 사실과 대책을 감독원에게 보고하여야 한다.

2) 공사 중 수급자의 과실로 공사시설, 차량 등의 재산과 인명에 손상을 주었을 때에는 수급자의 부담으로 복구 및 보상한다.

1.13 시공, 기성 및 준공검사

1) 수급자는 공종별로 매 작업단계마다 서면에 의한 검사요청 및 이에 따를 감독원의 검사를 받지 않으면 다음 단계의 작업을 진행할 수 없으며, 시공 중 검사의 불승인에 따른 공기연장은 허용치 않는다.

2) 단계별 시공을 필요로 하는 구간의 연계되는 작업 공종 및 관계 공사 현장간의 진도를 수시 조사하여 불의의 사고를 당하지 않도록 단계별 연계 작업에 차질이 없도록 한다.

3) 수급자는 공사가 완료되어 준공검사를 요청하거나 공사도중 기성금 수령을 위한 기성검사를 요청할 경우 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 감독원 및 검사원의 지시에 따른다.

4) 준공 검사원의 검사결과 검사기준에 미달하였을 경우에는 수급자 부담으로 재시공 하여야 한다.

5) 감독원 및 검사원은 준공검사 및 시험결과가 해당 목적물이 만족할 수 있는 상태라고 인정되었을 때에는 준공 조치한다.

6) 수급자는 감독원과 협의에 따라 시공중 설계 변경하여 시공되는 부분을 포함하는 제 시설을 설계원도를 포함한 준공 도집을 작성, 준공검사 시 제출하여야 하며, 준공도집의 규격은 감독원과 협의하여 결정한다.

7) 수급자는 설계도서에 의거 준공 예정일 보다 앞서 준공된 부분에 대하여는 부분 준공을 신청할 수 있으며, 이때 발주자는 필요한 조치를 취하며, 또한 발주자의 요구에 의해 일정한 구간에 대하여 우선 준공토록 한 조치에 대하여는 이에 응하여야 한다.

1.14 비용부담

공사시행에 있어 다음 각 항에 필요한 비용은 수급자의 부담으로 한다.

1) 공사 시방서, 도급금액 내역서, 도면 등에 명기되지 않은 사항이라도 공사의 성질상 당연히 조치하여야 할 사항, 그리고 시공방법을 현저히 변경하였을 때에는 당초 목적에 맞도록 마무리 하는데 소요되는 비용.

2) 기성부분 및 준공검사 등의 검사에 필요한 사항.

3) 수급자가 부담하는 재료, 기계기구 등의 시험 및 제 검사와 감독원이 입회할 때의 필요한 사항.

4) 수급자의 책임으로 인한 제 삼자의 피해에 대한 보상.

5) 현장 청소 및 정리정돈.

6) 수급자의 필요에 의해 야간작업이나 공휴일 작업 시행 시 이에 따른 제반추가 비용.

1.15 도면관리 및 보관

1) 본 공사는 발주자가 제공한 설계도면으로 시공하되 시공에 앞서 감독원과 협의 후 시공에 임하도록 한다.

2) 수급자는 관계 도면 보관에 만전을 기할 것이며, 변경이 있을 시는 깨끗이 변경사항을 기입하고, 변경일 및 변경 이유 등을 명확히 기재하여야 하고, 준공 시에는 깨끗이 정리된 준공도집을 작성 제출하여야 한다.

3) 수급자는 변경도면이 추가될 때 원도면을 별도 보관하고 시공에 차질이 없도록 현장에서 빠짐없이 회수하여야 한다.

4) 설계도면에 포함된 Shop Drawing(시공도, 현척도 또는 제작도)이외에 특별히 감독원이 필요하다고 판단하여 요구하는 구조물에 대하여 수급자는 현장여건에 따른 Shop Drawing을 제출하여야 한다.

1.16 공사표준시방서 비치

1) 공사에 관련되는 제 표준시방서, 참고도서, 카탈로그, 기술관련 도서를 항시 현장에 비치하고 필요시에 감독원이나 기타작업원이 열람할 수 있도록 하여야한다.

1.17 공사의 일시중단

1) 감독원은 시공도중 다음사항이 발생할 경우 공사를 일시 중지 시킬 수 있으며 공사 중지로 인한 공정만회 및 비용은 수급자가 부담하여야한다.

① 기후의 악조건으로 공사의 품질에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

② 수급자가 설계도서에 적합하도록 공사를 시행하지 않거나 감독원의 지시에 정당한 사유없이 응하지 않을 때

③ 현장 공사종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

④ 공사종사원의 기술미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때

⑤ 관련공사의 진척상황을 보아 공사의 계속시행이 부당하다고 인정될 때

1.18 기 타

1) 수급자는 본 공사 시공 시 기존 및 기 시공 구조물의 변화를 주의 깊게 관측하고 변화가 있을 시는 즉시 공사를 중지하고 감독원과  충분히 협의하여야 하며 이를 소홀히 함으로 인하여 발생되는 모든 문제에 대해서는 수급자가 책임을 져야 한다.

2) 시공 및 자재에 대한 감독원의 검사 절차를 거쳤다 할지라도 시공 및 자재 불량으로 인한 사고의 책임은 수급자에게 있다.

3) 현장에서 발생할지 모르는 콘크리트 등의 건설 폐자재는 재활용 또는 적절한 방법에 의하여 처리하여야 하며, 재활용시는 건설폐자재 재활용 지침에 따라 시행하여야 한다.

제3장 균열보수 및 단면복구공사

2.1. 적용의 범위

(1)본 시방서는 우레탄 계 콘크리트 구조물의 균열보수 설계 및 시공의 기본을 나타낸다.

(2)본 시방서에서는 『사용재료』의 품질과 설계용 보수 『시공』 및 『시공관리』의 요령에 대하여 나타낸다.

(3)본 시방에 기재되어 있지 않은 사항은 이하의 시방서 지침 등의 기술 기준에 준하는 것으로 한다.

①도로교통 시방서[공통편][콘크리트교편]

②콘크리트 표준시방서[설계편][시공편]

③콘크리트 구조물의 유지관리 지침

④콘크리트 구조물의 보강 지침

2.2. 공법 개요

우레탄계 균열보수제를 사용하는 콘크리트 구조물의 균열보수 시공의 흐름은 대체적으로 아래와 같다.

1)공사준비

2)바탕면처리 : 동판철거, 지수, 결함부 제거

3)우레탄주입

4)면정리(표면마감)

2.3 사용재료

1) 주입재(우레탄)

(1) 주입재는 우레탄계의 주입제로 사용 전 감독관에게 관련된 자료(시험 성적서) 등을 시공 계획서를 포함하여 제출한다.

(2) 주입재는 1액형으로 취급이 간단하고 내구성이 양호한 주입재를 사용한다.

2) 퍼티 또는 단면복구 용 모르타르

(1) 주입 후 컷팅된 면에 대하여 퍼티 또는 단면복구용 모르타르 사용을 사전 검토 하여야 한다.

단면복구용 모르타르는 기존콘크리트 구조물의 결함개소를 복구하기 위한 매우 중요한 재료로 일체화효과에 대해서 충분하게 확인 된 것을 사용해야 하며 시공 전 감독관에게 관련된 자료(시험성적서 등)을 제출한다.

(2) 단면복구용 모르타르를 사용할 경우 기존 콘크리트 표면이 습윤상태로 부착력 등의 기능을 충분히 발현할 수 있는 상태에서 시공해야 한다.

(3) 단면복구용 모르타르는 양호한 시공성을 발휘할 수 있는 것이어야 한다.

2.4 시공

1) 시공일반

(1) 균열보수, 도장, 단면복구는 시공방법, 사용목적 등을 고려하여 충분한 효과를 얻을 수 있도록 시공하여야 한다.

(2) 사용에 있어서 사전에 시험시공을 행하여 주입범위, 효과 등을 확인 후 시공에 임해야 한다.

2) 사전조사

(1) 균열보수에 앞서 감독관에게 보수위치와 주입지점을 확인받고 시공에 임하여야 한다.

(2) 시공에 있어서는 보수 시공도를 각 개소별로 작성 제출하고 결함부 제거 후 특이한 사항이 발생할 경우에 즉시 감독원에게 보고 후 다음 지시를 따라 시공에 임해야 한다.

3) 결함부 제거

(1) 균열주입부 중 철근 노출, 재료분리 등 중성화, 열화, 피복부족등)의 보수에 적용한다.

(2) 콘크리트 구조물에 발생된 결함을 완전하게 제거하여 건전한 구조물이 노출되도록 시공한다.

(3) 제거시 노출된 철근에 손상이 가지 않도록 소형공구를 사용하여 시공한다.

(4) 부식된 철근부위는 철근이 완전히 노출(철근 아래 최소 20mm)되도록 콘크리트를 제거해야 한다.

(5) 제거된 콘크리트 잔재는 도상에 혼입되지 않도록 조치를 강구하고 수집된 잔재는 즉시 현장외부로 반출해야 한다.

4) 철근노출 보수

(1) 결함부 제거 시 부식, 손상되어 노출된 철근의 보수에 적용한다.

(2) 노출된 철근 중, 심하게 부식(철근단면의 25%이상)된 철근은 부식 된 부위를 절단 제거하고 새로운 철근으로 기계적으로 연결하여 시공해야 한다.

(3) 부식된 철근의 녹 제거는 연마지 또는 와이어 브러시를 사용, 완전히 제거해야 한다.

(4) 녹 제거 후 철근표면에 부착되어 접착을 방해하는 이물질을 제거하고 방청시멘트를 누락 된 곳이 없도록 세밀하게 도포해야 한다.

(5) 철근의 방청이 필요할 경우 시공자는 사용하고자 하는 방청제의 시험성적서를 감독관에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

5) 지수 및 Scailing공

(1) 많은 누수로 인하여 지수가 불가피 할 경우 감독관에게 보고하고 이의 방침을 받아 시공한다.

(2) 지수제는 탄성재 및 급결시멘트계, 기타 재료를 구분하여 감독에게 경제성을 고려 제출한다. 단, 누수개소의 차수를 목적으로 시행하므로 주입재 약액의 누출 및 압력손실을 방지하기 위하여 보수부위 및 콘크리트 결함개소에 대하여 Seal제를 사용 밀봉처리 한 후 양생을 시킨다.(최소1일)

(3) Sealing작업은 보수범위 뿐만 아니라 인근 구조물의 결함개소(약액 누출 염려개소)에 대해서도 사전 조사 후 시행하여 약액 주입시 약액누출로 인하여 작업이 중단되는 일이 없도록 해야 한다.

7) 주사기 주입

(1) 본 설계는 주사기를 이용한 주입방식이므로 균열폭, 균열깊이 등을 고려 변경이 필요할 경우 감독관에게 이를 보고하여 방침을 받는다.

(2) 주입순서는 천장 주입 후 벽체주입을 원칙으로 하고 가장 낮은 주입공에서 시작해서 가장 높은 주입공으로 진행하며 천장부에서는 중앙부에서 벽체 쪽으로 진행해야 한다. 주입재는 낮은 주입공의 공간이 주입재로 완전히 채워지기까지는 다음으로 더 높은 주입공에 주입해서는 안 된다.

(3) 채워진 공간의 판단은 더 높은 곳의 주입공에서 주입재가 유출되는 것으로 그보다 아래에 있는 공간이 주입제로 완전히 채워졌다고 판단한다.  이렇게 유출되는 주입재는 요구된 점도가 나타낼 때까지는 계속적으로 주입해야 한다.

(4) 주입완료의 판단은 주입재가 요구된 점도로 위에 있는 주입공에서 유출되고 있는 것이 관찰되고, 감독원이 달리 결정하지 않는다면, 주입재를 요구된 압력으로 주입할 수 없을 때 주입이 완료된 것으로 본다.

(5) 주입작업 중 또는 작업 후 발생되는 모든 주입잔재를 적절하게 처리해야 하며, 주입작업으로 생긴 모든 주입재 폐기물은 제거시켜야 한다.  현장 내에 버려진 주입재가 응결되게 두어서는 안 된다.

8) 단면복구

(1) 본 항목은 주입완료 후 퍼티 작업등으로 결함부의 면처리가 불가할 경우인 철거부위의 단면복구에 적용한다.

(2) 단면복구 전 콘크리트 표면의 흙먼지, 레이탄스, 부식 또는 기타 더러운 것은 물을 뿌리고 쇠솔질해서 청소한 후 물로 씻어내    고 건조시켜야 한다.

(3) 신구 콘크리트 접착제를 사용할 경우에는 복구 몰탈과 반응 해 확실한 접착성능을 나타낼 수 있어야 한다.

(4) 붓 또는 Spray를 사용, 시공개소에 빠짐없이 골고루 충분히 도포해야 하며 양생은 최소 1일 이상하여야 한다.

(5) 배합에 필요한 혼합 수는 기름, 산, 유기불순물, 혼탁물 등 콘크리트나 강재의 품질에 나쁜 영향을 미치는 물질의 유해량을 함유해서는 안 된다.

(6) 혼합수는 몰탈의 응결경화, 강도의 발현, 체적변화, 위커빌리티 등의 품질에 나쁜 영향을 미치거나 강재를 녹슬게 하는 물질을 함유해서는 안 된다.

(7) 모르타르의 배합은 소정의 강도(强度)를 얻을 수 있도록 설계규정에 정한 배합비를 이용해야 하며 소요의 품질이 얻어지는 범위 내에서 단위 수량 및 물-시멘트를 가급적 적게 하여야 한다.

(8) 저장중에 약간이라도 굳은 시멘트는 공사에 사용해서는 안 된다.

(9) 몰탈의 시공은 손바름 공법에 의해 실시하는 것이 원칙이다.

(10) 몰탈의 바름은 흙손누름 또는 손으로 밀어 넣어 표면의 평활을 꾀하고 공극이 없도록 빠짐없이 충전하여야 한다.

(12) 최종 마무리면은 평활하여야 하며 인접한 구조물의 표면과 단차가 없어야 하고 또한 수축균열이 없어야 한다.

(13) 양생은 습윤양생을 원칙으로 하고 환기구 주변이나 온도변화가 심한 곳은 몰탈 표면이 건조하여 건조 수축균열이 발생할 염려가 있기 때문에 충분히 주의하고 필요에 따라 적절한 양생을 실시해야 한다.

9) 표면정리

(1) 콘크리트 표면의 마무리공사에 적용한다.

(2) 시멘트에 접착강화제를 혼합하여 형상은 보수부위를 포함하는 단순한 형태로 시공해야 한다.

(3) 인근 구조물과 어울리도록 색상은 감독원과 협의하여 시행한다.

2.6 안전 및 환경관리

1) 일반사항

(1) 본 공사는 차량 및 통행이 제한된 조건 하에 시행되는 공사로 사전에 작업계획서를 제출하여 공사감독원의 승인을 득한 후 계획 된 시간 내에 필히 완료하여야 한다.

(2) 인접작업장 내로의 출입은 임의로 할 수 없으며, 반드시 공사감독원의 지시에 따라 출입하여야 한다.

(3) 작업원의 출입 또는 작업 시에는 안전사고에 유의하여 매일 작업 전에 안전교육을 시행하여야 한다.

(4) 작업장에 장비를 활용할 경우 반드시 통행인을 고려하여 차단 막을 설치하여야 한다.

(5) 작업 중 기 설치되어 있는 각종 지장물 및 전선에 주의하여 안전사고가 발생치 않도록 하여야 한다.

(6) 작업장 내에는 인화물질을 반입하여서는 안 되며, 사용하고자 할 때에는 공사감독원의 승인을 받아 특별관리 하여야 한다.

(7) 중량물 작업 시에는 반드시 협동작업으로 안전하게 하여야 한다.

(8) 전기, 가스 및 인화물질의 취급은 특별 관리하여 화재예방에 만전을 기하여야 한다.

(9) 공사 중 공공시설물이나 사유재산에 피해가 발생될 때에는 도급자가 모든 책임을 지고 조치하여야 한다.

(10) 공사 시행 전 공사 케이블선 상부에 안전보호대를 설치하고 작업에 임해야한다.

(11) 매 작업 완료 후 작업장 주변은 천막과 함께 깨끗이 청소하고 잔재는 작업장 밖으로 반출하여야 한다.

(12) 현장에 사용하는 강재 말비계는 조립해체가 용이하고 바퀴가 있는 경우에는 브레이크 장치를 설치하고 승강 계단을 설치하여야 한다.

(13) 상부 발판은 흔들리지 않도록 고정장치를 설치하고 표준 난간을 반드시 설치하여야 한다.

(14) 작업원이 강재 말비계에 오르기 전에 안전관리자 또는 작업책임자는 바퀴 또는 비계하부와 지상부와의 수평상태와 접지상태를 확인하고 표준안전난간 설치상태를 확인 후 본 작업에 착수하여야 한다.

(15) 강재말비계 상부에서 무거운 자재나 장비는 도르래와 로프를 이용하여야 하며 인력으로 끌어올리는 작업은 금지하여야 한다.

(16) 작업원은 안전모, 안전벨트 착용과 콘크리트 파쇄 그라우팅 작업시 보안경 착용을 준수하여야 한다.

(17) 분진발생 작업시 안전관리자는 작업원에게 방진마스크 지급 및 착용상태를 점검하여야 한다.

(18) 개인 안전장구 및 보호구 미착용 작업원은 작업에서 제외시켜야 한다.

제4장 아크릴수지 배면방수

4.1 재료

1) 주성분 : 아크릴수지(2액형)

2) 혼합점도 : 20mPa.s 이하

3) 배합비 : 100:100

4) 경화물 : G디

5) 일축압축강도 : 0.06 N/㎟이상

6) 투수계수 : 1.0×1.0(-8승)

7) 비중 : 1.05 ± 0.05

8) 경화물 : G디

9) 용도 : 건축, 토목 구조물의 누수 지수 및 배면 그라우팅

4.2 시공

1) 천공

(1) 비파괴 검사 및 설계도면을 참조하여 철근 절단 위치를 피해 천공할 위치를 선정 한다.

(2) 천공 및 굴공은 벽체는 Drill(14㎜), 천장은 Drill(10㎜)로 천공을 하며, 보수결함 개소의 중심을 따라 공간격 1,000㎜로 천공한다.

(3) 천공시 용수가 많은 곳은 임시수발공 설치 또는 일정위치로 유도하는 등의 조치를 취한다.

2) 주입구 설치

(1) 천공한 홀 내부를 에어 콤프레셔 및 물로 이물질 등을 깨긋이 청소한 후 주입파이프나 Packer를 설치하고 그 주위는 급결 몰탈 및 Epoxy Putty로 씰링한다.

(2) 약액 주입시 약액의 누출 및 압력손실을 방지하기 위하여 보수부위 및 콘크리트 결함개소에 급결 몰탈 및 Putty재를 사용하여 Sealing을 한다.

(3) 일반 배면주입의 경우 Packer(10～100㎜, 14～120㎜)를 사용하지만, 다량 누수의 경우는 벨브가 달린 PVC파이프를 사용할 수 있다.

3) 주입장비의 점검 약액 조제

(1) 아크릴수지는 A제외 B제로 구분되어 공급되는 가사시간이 매우 짧은 타입의 제품이므로 이액형 타입의 펌프로 주입하여야 한다.

(2) 주입 작업전에 주입 펌프의 장비 상태를 철저히 점검하고 A제와 B제의 배합비가 맞게 믹서 토출되는지 점검한다.

(3) 약액 주입 전용 장비에 각각 A제와 B제를 용기에 충전한다.

4) 주입작업

(1) 주입 노즐을 주입구에 접속하여 주입을 개시한다.

(2) 주입은 하단부에서부터 순차적으로 주입을 하며, 다음 주입구에서 아크릴수지의 유출이 확인되면 그 주입구와 주입하고 있는 주입구를 닫고 봉합하여 노즐을 뺀다.

(3) 위와 같은 방법으로 모든 주입구에 아크릴수지를 주입해나간다.

5) 마감

(1) 지수가 완료되면 주입파이프 또는 주입호스를 구조물의 면에 맞추어 절단 제거한다.

(2) 표면을 그라인더 등으로 평활히 한 후 몰탈등으로 마감을 하고 그후에 필요한 경우 도장을 한다.