문서번호	토목부-17965
결재일자	2017.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	08/28 김영수
협조
	주무관		박운용

양재대로 도로확장 구간 임시 보도 철거 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

도시기반시설본부

토목부

양재대로 도로확장 구간 임시 보도 철거 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

공사중 양재대로 확장 구간에 설치한 임시 보도에 대하여 최종 보도 조성 시에 기존 보도, L형측구, 경계석 철거 물량이 누락되어 있어 검토 보고 드림

1		공사개요

❍ 위    치 : 선암U/D ~ 강남 수서IC

❍ 규    모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량2개소, 지하차도 4개소)

❍ 총사업비 : 3,552억원(도급비 234,862백만원)

❍ 사업기간 : ’02.7.3. ~ ’18.7.31.

❍ 시공사/감리단 : 롯데건설(주) 외 1 / ㈜동명기술공단

2		보고내용

❍ 양재대로의 공사중 도로확장 구간에 대하여 최종 보도 조성 시에 철거할 보도, L형측구, 경계석 수량이 누락되어 반영이 필요함

❍ 보도 포장 계획도

❍ 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증․감	비고
무근콘크리트깨기	T=30cm미만	m3	-	1,115	1,115
보도블록 철거	T=6cm	m2	-	9,750	9,750
경계석 철거	150×150×1,000 외	m	-	4,490	4,490
폐기물 상차	360×360×H500	톤	-	4,145	4,145

❍ 공사비 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증․ 감	비 고
	토공	-	25,366	25,366
	부대공	-	3,884	3,884
직접공사비		-	29,250	29,250
제경비		-	6,205	6,205
공급가액		-	35,455	35,455
V.A.T		-	3,545	3,545
총공사비		-	39,000	39,000

3		조치계획

❍ 양재대로 공사중 도로확장 구간에 설치한 임시 보도에 대하여 최종 보도 조성 시에 계획되어 있는 임시 보도 철거 수량이 누락되어 책임건설사업관리기술자의 수량 누락 반영 실정보고 내용은 타당하므로 승인 처리하고, 추후 설계변경에 정산 반영하고자 함.

붙 임 : 1. 건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

2. 실정보고 1부.  끝.