문서번호	설비부-14597
결재일자	2017.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
백남진		代이호완	08/29 권오식
협조

공사기간 연장 검토보고

『세운상가 활성화를 위한 공공공간조성 전기공사(총차,1차,2차)』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 08.

공사기간 연장 검토보고

『세운상가 활성화를 위한 공공공간조성 전기공사(총차,1차,2차)』

「세운상가활성화를 위한 공공공간조성 전기·통신공사」에 대하여 건설사업관리단으로 부터 공사기간 연기보고서가 제출되어 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 전기·통신공사의 공사기간 변경요청 보고(총차,1차,2차) : itm제17-1335(2017.08.28.)

Ⅱ		공사개요

공 사 명	세운상가 활성화를 위한 공공공간조성 전기공사	세운상가 활성화를 위한 공공공간조성 통신공사
공사규모	다목적홀/경사광장, 데크조성, 플랫폼 셀, 보행교설치 (경관조명 3,595등, CCTV설치, 분전반 및 조명제어 1식)
공사기간	총차 : 2016.04.25. ~ 2017.08.31 1 차 : 2016.04.25. ~ 2017.08.31 2 차 : 2016.12.19. ~ 2017.08.31	총차 : 2016.04.25. ~ 2017.08.31 1 차 : 2016.04.25. ~ 2017.08.31 2 차 : 2016.12.19. ~ 2017.08.31:
도 급 비	총차 : 1,557,279,800 1 차 : 1,090,639,000 2 차 : 466,640,800	총차 : 548,539,000 1 차 : 434,676,000 2 차 : 113,863,000
시 공 사	(주)금강전력	㈜ 신보
감 리 사	(주)아이티엠코퍼레이션

Ⅲ		검토내용

□ 공사기간 연기사유

선행공종인 건축분야의 공기연장으로 조명설비 및 통신설비 등 후속공정인 전기·통신공사의 공사기간 절대부족

□ 공사기간 연기

○ 공사명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간조성 전기공사

(단위 : 원)

구 분	당 초			변 경
	총차	1차	2차	총차	1차	2차
도 급 비	1,557,279,800	1,090,639,000	466,640,800	변동없음	변동없음	변동없음
공사기간	2016.4.25. ~2017.8.31	2016.4.25. ~2017.8.31	2016.12.19. ~2017.8.31	2016.4.25. ~2017.9.20	2016.4.25. ~2017.9.20	2016.12.19. ~2017.9.20
연장일수				- 기한연기 : 20일(증) - 계약금액 변동없음

○ 공사명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간조성 통신공사

(단위 : 원)

구 분	당 초			변 경
	총차	1차	2차	총차	1차	2차
도 급 비	548,539,000	434,676,000	113,863,000	변동없음	변동없음	변동없음
공사기간	2016.04.25. ∼2017.08.31.	2016.04.25. ∼2017.08.31.	2016.12.19. ∼2017.08.31.	2016.04.25. ∼2017.09.20.	2016.04.25. ∼2017.09.20.	2016.12.19. ∼2017.09.20
연장일수				- 기한연기 : 20일(증) - 계약금액 변동없음

□ 선행공정(건축분야) 공사기간 연기로 후속공정인 전기·통신공사의 작업 등이 기한내 작업 할 수 없는 여견으로 공기연장함이 타당 함.

Ⅳ		검토결과

□ 건설사업단의 공사기간 연장 검토보고가 적정하여 현장여건에 맞게 공사기간을 연장하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙   임 : 공사기간 연자요청 검토의견서 각 1부.  끝.