문서번호	설비부-13972
결재일자	2017.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	08/17 권오식

설계변경 검토 보고

- 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 08.

도시기반시설본부

[설 비 부]

설계변경 검토보고

- 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사 -

우리본부에서 추진중인「서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사」와 관련 건설사업관리단으로부터 설계변경 요청이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림

1. 관련 근거

○ 한종홍릉 제2017-265(2017.08.16.)호

- 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사 설계변경 요청

2. 공사개요

○ 공 사 명: 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사

○ 공사개요: 지하1층/지상4층(연면적 3,852㎡)

수전설비, 전등 전열설비, 소방설비, 기타

○ 공사기간: 2017.02.23. ~ 2017.08.19.

○ 도 급 액: 927,600,000원,

○ 시 공 사: (주)대아티이씨 대표 김종용

○ 감 리 사:  ㈜한국종합건축사사무소

3. 설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 방화문 자동폐쇄장치 설계 누락부분 반영에 따른 금액 변경.

○ 설계변경 주요내역

구 분	수 량			증·감
	단위	당 초	변 경	수량	금 액(원)
- 강제전선관(노출) 아연도강관	m	1,777	1,918	141	2,915,855
- 아우트렉박스 8각 54mm	개	129	139	10	199,880
- 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 2.5sq (1.78mm)-단선	m	1,949	2,206	257	407,088

- 소방용내열전선(F-FR-3) 코어형, 2C×1.78mm	m	145	266	121	425,436
- 파이프행가 16C	식	565	625	60	64,680
- R형중계기 4회로	개	0	5	5	1,147,520
- 풀박스 150x150x100	개	6	11	5	188,700

○ 공사금액 변경 내용                                       (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
전기 공사	공급가액	843,272,718	850,600,000	7,327,272
	부가가치세	84,327,272	85,060,000	732,727
	도급액	927,600,000	935,660,000	8,060,000

4. 검토자 의견

○ 본 공사의 건설사업관리단의 설계변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 계약금액 변경을 시행하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 1. 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기공사 설계변경 요청.

2. 설계변경도서  1부(별도첨부). 끝.