	북부도로사업소
수신자	도로보수과장
(경유)
제 목	변경계약체결통보(2016년 노후 포장도로 정비공사(1구역))

1. 도로보수과-8664(2017.8.31)호와 관련입니다.

2. 아래건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 2016년 노후 포장도로 정비공사(1구역)

나. 변경사항 : 계약금액 및 납품기한 변경

다. 변경계약 체결현황

구 분	당 초	변 경
계 약 자	주식회사 에스지공영	변경사항 없음
계약금액	1,376,700,000원	1,389,840,000
납품기간	2016.04.26. ~ 2017.08.30.	2016.04.26.~2017.09.30.

붙 임 : 변경계약서류 1부.  끝.

	관리단속과장
주무관	윤미향		관리단속과장	09/01 박대군
협조자
시행	관리단속과-11603	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 북부도로사업소 관리단속과	/	ush.seoul.go.kr
전화	02-944-5414	/전송	02-945-5071	/	hjje1120@seoul.go.kr	/	대시민공개