문서번호	사회혁신담당관-10643
결재일자	2017.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		혁신파크조성팀장	사회혁신담당관
김범철		이영욱	09/07 마채숙
협조

서울혁신파크 1단계 조성사업 시설 관련 요청사항 검토 보고(노후보안등 교체 등)

2017. 9.

서울혁신기획관

(사회혁신담당관)

「서울혁신파크 1단계 조성사업」

시설 관련 요청사항 검토 보고(노후보안등 교체 등)

「서울혁신파크 1단계 조성사업」과 관련, 운영기관(서울혁신센터)으로부터 일부 공사내용 변경 요청이 있어 이를 검토하고 보고 드림

□ 검토근거 : 서울혁신파크 1단계 조성사업 시설 조성공사 관련 요청사항 전달〈1단계기획팀-57호(’17.09.04.)〉

□ 운영기관 요청내용

○ 파크 내 노후보안등 교체, 발전기실 및 전기실 LED 조명등 추가 설치

- 노후화로 인한 보안등 작동불량 및 전기실 작업자 작업환경개선 필요

○ 비상벨 주장치 경비실(23동) 추가 설치

- 보안업무 관련 주근무지(경비실) 추가 비상벨 장치 설치 필요

○ 실별 계량기 구획 및 콘센트 위치 변경

- 설계변경에 따른 계량기 구획 및 콘센트 위치 조정 필요

□ 검토내용

○ 보안등 신설(12개소)에서 노후 보안등 및 전력케이블 교체로 공사내용을 변경하여 기존 노후 시설 개선 활용

노후 보안등(작동불량)	LED보안등

○ 전기실 야간 근무환경 개선을 위해 출입문 상부 등 외부 조명 추가 설치

전기실 출입문(외부 조명 없음)	전기실 출입문(외부 조명 없음)

○ 현재 화장실 비상벨은 9동 1층 통합방재실에 연결되어 있으며 경비원 근무지(정문 경비실)에서도 신속한 확인 및 조치가 이루어질 수 있도록 경비실 내 추가 비상벨 장치 설치

○ 공간활용계획 변경에 따른 실 구획 변경에 따라 관리비 정산 및 운영상 편의 등을 위한 계량기 구획 및 콘센트 위치 조정

□ 처리의견

○ 발주처(도시기반시설본부 설비부)에 노후 옥외보안등 교체 설치 등 운영기관(서울혁신센터)요청내용 검토 및 공사 반영 요청

○ 서울혁신센터에 검토내용 회신

붙임 : 관련 요청 공문 1부.  끝.