투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰[모두의학교 리모델링 기계설비공사(1차)]

우리본부에서 시행중인『모두의학교 리모델링 기계설비공사(1차)』준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공연기 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
1 차	2017.01.09. ~ 2017.09.08.	2017.01.09. ~ 2017.09.30.	22일 증
총 차	2017.01.09. ~ 2017.11.08.	2017.01.09. ~ 2017.11.08.	변경없음.

나. 귀책소재 및 연기사유

- 귀책소재 : 도시기반시설본부

- 지체상금 : 미부과

- 연기사유 : 선행공종(건축공사) 지연에 따른 금차 준공기일 연장

붙임 :  1) 준공기한 연기검토 보고서 1부

2) 준공기한 연기 의뢰서(합의서 포함) 1부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		녹색성장과장	오삼록		설비부장	09/08 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-15357	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8620	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	대시민공개