문서번호	건축부-16141
결재일자	2017.9.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정호기		조영수	09/15 김진용
협 조
	주무관			김현욱

『서울혁신파크 1단계 조성사업』

건설사업관리용역 계약변경 검토 보고

2017. 9.

서울특별시 도시기반시설본부

건 축 부

『서울혁신파크 1단계 조성사업』

건설사업관리용역 계약변경 검토 보고

『서울혁신파크 1단계조성공사』건설사업관리자로부터 공사기간 변경으로 기술자 재배치 및 효율적인 업무수행을 위한 건설사업관리용역 계약변경 요청에 대해 검토 보고함.

1		용역개요

용 역 명 : 서울혁신파크 1단계 조성사업 건설사업관리용역

위    치 : 은평구 녹번동 5번지 일대(구,질병관리본부)

규    모 : 지하1층, 지상5층 / 연면적 13,548.79㎡ 리모델링

용역기간 : 2016.12.30 ~ 2018.01.29.(2차: 2017.07.14.~2017.12.20)

용역비: 1,014,640천원 (2차 : 415,640천원)

계 약 자 : ㈜종합건축사사무소 동일건축 외 1

2		추진경위

2016.12.30. : 건축공사계약((주)씨스페이스외 2) 및 착수

2016.12.30. : 건설사업관리 계약 ((주)종합건축사사무소 동일건축 외 1)

2017.07.13. : 건설사업관리 1차 계약 준공(2016.12.30.~2017.7.13.)

2017.09.11. : 건설사업관리용역 총차 및 2차 계약변경 요청

3		계약변경 요청내용

공사기간 변경에 따른 용역기간 및 용역금액 변경

- 서울혁신파크 1단계 조성공사 준공기한 연장(108일, 건축-14718/ 2017.8.25)에 따른 건설사업관리 기술자 재배치로(붙임1,2참조) 건설사업관리용역 총차 및 2차계약의 기간 및 금액을 조정코자 함.

변경내용

- 총차 및 2차계약 변경

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
기술자배치기간		2016.12.30.~2017.11.16	2016.12.30.~2017.12.20	(증) 34일
총차	기간	2016.12.30.~‘18.01.29	2016.12.30.~2017.12.20원	(감) 26일
	금액	1,014,640,000원	1,115,859,000원	(증)101,219,000원
2차	기간	2017.07.14.~2017.12.20	2017.07.14~2017.12.20	변동없음
	금액	415,640,000원	516,859,000원	(증)101,219,000원

4		검토의견

건축공사기간 연장(준공일 : 2017.8.29.➡2017.12.15, 108일)에따라 공사의 적정  품질 확보 및 원활한 사업 수행을 위한 기술자 배치기간 조정으로 건설사업관리 용역기간 및 용역금액을 변경하는 사항임.

추가 사용예산 101,219,000원은 아래예산에서 재배정요청하여 사용가능함.

- 예산과목 : 사회혁신담당관, 사회문제해결을 위한 사회혁신의제 발굴실행.       사회혁신기반조성 및 성과확신, 사회혁신파크 조성사업,, 감리비

총차 및 2차의 계약기간, 계약금액은 변경계약하는 것이 타당하므로 건설총괄부에 계약변경 의뢰코자 함.

붙임 : 1) 건설사업관리용역 계약변경요청서 1부.

2) 2차 기술자 배치변경현황 1부.

3) 공사기간 연장검토보고(2017.8.25) 1부.  끝.