문서번호	시설보수과-3463
결재일자	2017.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
양지웅		박춘배	09/15 代박영종
협 조

준공기한 연기보고

[신답지하차도 등 5개소 내진성능평가 및 내진성능개선공사 실시설계 용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 09.

성 동 도 로 사 업 소

(시설보수과)

준공기한 연기보고

우리 사업소(시설보수과)에서 시행중인 『신답지하차도 등 5개소 내진성능평가 및 내진성능개선공사 실시설계 용역』를 시행 함에 있어, 준공기한 연기사유가 발생하여 보고드림

Ⅰ		사업개요

공 사 명 : 신답지하차도 등 5개소 내진성능평가

및 내진성능개선공사 실시설계용역

공사기간 : 2017.05.22.~2017.09.18.

계약금액 : 금136,250천원

도 급 자 : ㈜유신 대표 성낙일

Ⅱ		준공기한 연기

사  유

- 자문회의 2차 검토의견 및 위원 공통 질의 의견(신답지하차도 응답수정계수 적용여부 검토 등)에 대한 검토, 반영하기 위한 절대공기 부족.

기  간

- 당초 준공기한 : 2017.09.18.

- 변경 준공기한 : 2017.09.29. (11일 연장)

지체배상금 부과여부 : 미부과

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조 1항

Ⅲ		조치의견

상기 사유로 준공기한을 연기 조치하여 용역의 내실을 기하고자 함.

붙임  용역수행업체 준공기한 연기요청 공문 1부.  끝.