문서번호	교량안전과-17136
결재일자	2017.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
백운경		유제천	09/20 한유석
협조

『2017년 한강교량상유지보수공사(연간단가)-2공구』 설계변경(2회) 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

『 2017년 한강교량 일상유지보수공사-2공구 』

설계변경(2회)시행보고

우리시와 도급계약을 체결하고 시행중인 『2017년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구』 추진 중 책임건설사업관리기술자로부터 설계변경(2회) 보고가 있어 이에 대한 시행 보고 사항 임.

공사개요

공 사 명 : 2017년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구

공사기간 : 2017.01.05 ~ 2017.12.31

공사개요 : 교면포장 및 방수, 신축이음 보수, 균열보수, 단면보수 등

계약금액 : ￦2,661,671천원

시 공 사 : ㈜선진기술공사 외 1

건설사업관리용역사 : ㈜동명 외 2

설계변경 내용

변경 공사비

구 분		공 사 금 액			비 고
		당 초	변 경	증․감
총공사비	도 급 비	2,661,671,000	2,901,221,000	(증)239,550,000
	관 급 비	165,269,817	165,269,817	-
	폐기물처리비	39,484,030	39,484,030	-
	계	2,866,424,847	3,105,975,000	(증)239,550,000

설계변경 사유 : 작업지시(6~19차)에 의한 수량 증․감 및 신규공종 반영

⃞ 작업지시 주요 현황

○ 작업지시 6차 : 동작대교외7개소 상온식 차선도색 562㎡ 등

○ 작업지시 7차 : 양화대교 점검통로  274.2m 등

○ 작업지시 8차 : 서강대교 차선도색  48.6㎡ 등

○ 작업지시 9차 : 한강대교 교량 보도포장  1,364㎡ 등

○ 작업지시 10차 : 가양,마포대교 충격흡수시설보수 5개소 등

○ 작업지시 11차 : 양화대교 오름방지시설 신규 및 가공후 재설치 8개소 등

○ 작업지시 12차 : 행주대교 교량보도포장 1,290㎡ 등

○ 작업지시 13차 : 원효대교 신축이음장치 27m 등

○ 작업지시 14차 : 성산대교 콘크리트표면보수 14.5㎡ 등

○ 작업지시 15차 : 한강대교 교량 보도포장 1,516㎡ 등

○ 작업지시 16차 : 양화대교 교면방수포장 4.48a 등

○ 작업지시 17차 : 마포대교 아스팔트균열보수 3,942m 등

○ 작업지시 18차 : 동작대교 조류방지시설물 설치 954.7㎡ 등

○ 작업지시 19차 : 서강대교 신축이음 보수 9m 등

⃞ 주요 신규공종 현황

○ 상온식 아스팔트 균열보수 : 마포대교 3,942m

○ 교량보도부 포장공(CO-MSK,T=10㎜,야간) : 행주대교 1,290㎡

○ 신축이음장치 보수공(Finger Zite Joint 160A,야간) : 원효대교 27m

○ 오름방지시설 신규설치 및 가공후 재설치 : 양화대교 8개소

○ 충격흡수시설보수 : 가양대교 3개소, 마포대교 2개소, 원효대교 1개소

⃞ 주요 수량 변경 내용

공종	규격	단위	당 초 (수량)	변 경 (수량)	증.감 (수량)	비고
교면보수공	아스팔트균열보수	m	-	3,990	3,990
	절삭 후 아스팔트포장 5a이하, 야간	a	1	4.5	3.5
방수공	교면방수	㎡	902	452	-450
신축이음보수공	신축이음보수	m	29	44	15
콘크리트보수공	콘크리트표면보수	㎡	164	638	474
	콘크리트단면보수	㎡	515	686	171
강재보수공	오름방지시설 설치	개소	-	8	8
수중보수공	수중단면복구	㎡	3	17	14
도장보수공	강재도장	㎡	66	9	-57

책임감리원 설계변경 보고에 대한 조치 의견

책임건설사업관리기술자가 제출한 설계변경 사항은 적법하게 검토된 것으로 판단되어 책임건설사업관리기술자 보고 내용과 같이 설계변경 시행코자 합니다.

※ 추가 소요액(239,550천원) 집행잔액 활용하여 반영

- 2017년 한강교량 일상유지보수공사 하반기 추진 계획보고

( 교량안전과-15826, ‘17.8.31 )

첨 부 : 1) 책임건설사업관리기술자 설계변경 보고서 1부.

2) 설계변경(2회) 내역서 및 수량산출서 각 1부.

3) 2017년 한강교량 일상유지보수공사 하반기 추진 계획보고 1부. 끝.