문서번호	급수운영과-23130
결재일자	2017.9.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서장원		전결 09/21 최철민
협조

상수도공사 기성(제1차) 보고

「2017년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

2017. 9. 21.

남부수도사업소

(급수운영과)

상수도공사 기성(제1차) 보고

「2017년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

우리사업소에서 시행 중인 「2017년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」 에 대하여 계약업체로부터 기성요청서(1차)가 제출되어 아래와 같이 기성시행코자 보고드림

Ⅰ		공사 현황

○ 공 사 명 : 2017년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : D=20~300㎜, L=2,206m

○ 공사기간 : 2017. 6. 13. ~ 2018. 6. 30

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : *****************

Ⅱ		기성 현황

○ 기성(정산)차수 : 1차

○ 공사기간 : 2017. 6. 20. ~ 2017. 9. 11.

○ 공사시행 : D=20~80㎜, L= 380m, 소화전신설 등 46개소

○ 금회(1차) 기성금 : *************

○ 공사위치

- 신  설 : 관악구 신림동 1581-20외 89건

- 개  량 : 관악구 신림동 601-19외 34건

○ 예산과목별 지출현황

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비 : *************

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(노후배급수관정비) : ************

- 소방재난능력의향상으로 안정적인재난시스템구축,소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치,시설비및부대비,시설비 ************************************

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(지원사업성시설비-보온제) :*********

○ 기성지출현황

계약금액	전회까지 기성금액	금회(1차)기성금액	누계 기성금액	집행잔액	비고
***********	*	***********	***********	***********

Ⅲ		기성(1차) 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상없음

○ 관급 및 사급자재정산 수량 확인결과 : 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상없음

○ 기타 사항 : 이상없음

Ⅳ		조치 의견

○ 위 내용과 같이 기성내역 검토결과 적정하므로 제1차 기성을 시행코자 합니다.

붙 임  1. 기성요청서 1부.(별도)

2. 기성내역서(1차) 및 기성목록 1부.  끝.