	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	내곡지구 내 교통안전시설물 추가 공사 검토

내곡지구 교통영향평가 보고서 변경 등을 반영한 경찰서 교통안전시설 심의 교통안전시설 개선 설치 통보에 따른 공사시행을 다음과 같이 보고합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 내곡 보금자리주택지구 조성공사

○ 공사기간 : 2011.11.30. ~ 2017.12.31

○ 도 급 자 : 큰빛종합건설(주), 이수건설(주)

○ 도 급 비 : 37,239백만원

나. 관련근거

○ 2015년 제5차 교통안전시설 심의 교통안전시설 개선 설치 통보[서초경찰서 교통과-52(2016.01.04.)]

○ 2016년 제3차 교통안전시설 심의위원회 심의 결과 통보[서초경찰서 교통과-7409(2016.07.05.)]

○ 경찰서 교통안전시설 심의 결과 통보(하달)[서초5차][서울지방경찰청 교통관리과-36926(2016.12.25.)]

○ 교통안전시설물 계획 변경 실정보고[큰빛내17-061(2017.08.28.)]

○ 제2017-09회 설계변경심사위원회 원안가결(2017.09.18.)

다. 검토내용

○ 내곡지구 내 도로 교통안전시설물 관련, 경찰서 교통안전시설 심의 결과를 반영한 도로교통공단의 실시설계 성과물에 따라 공사를 조속히 시행하여 입주민의 도로 이용 안전에 만전을 기하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 단가 검토

- 기존단가 적용

○  공사비 검토(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	-	138,344	증) 138,344
제잡비 및 부가세	-	47,633	증) 47,633
도 급 액	-	185,977	증) 185,977
지급자재	-	-	-
총공사비	-	185,977	증) 185,977

라. 조치계획

○ 상기 검토내용은 설계변경심사위원회에서 원안가결된 사항으로 사업의 시급성을 감안하여 우선 시행하고 추후 설계 변경시 정산·반영코자 함.

붙임  1. 부의안 및 설명서-내곡지구 내 헌릉로변 방음벽 기초형식 및 수량 변경 등 검토 외 2건

2. 의결안(제2017-9회)-내곡지구 내 헌릉로변 일부구간 방음벽 기초형식 및 수량 변경 등 검토 외 2건

3. 2017.08.31 (실정보고)교통안전시설물 계획변경.  끝.

부 원						택지조성부장				택지조성처장			택지사업본부장		09/22
		설재훈						박영욱			박광균			김소겸
협조자
일 상 감 사	감사실장		심윤수				감사일자 :	2017/09/21		감사일련번호: No.	894		감사의견여부 :	의견없음

시행			택지조성부-4776				(2017.09.22)			접수				()
방침번호			본부장 방침 제564호
우	135-988			서울 강남구 개포로 621								/
전화		02)3410-7579			전송	02)3410-7619		/	wogns79@i-sh.co.kr					/	공개