	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	내곡지구 지구계획 변경 등에 따른 추가 공사 검토

내곡지구 지구계획 변경(3차례) 등에 따른 도로 및 우·오수, 상수도 추가 공사 시행을 다음과 같이 보고합니다.

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 내곡 보금자리주택지구 조성공사

○ 공사기간 : 2011.11.30. ~ 2017.12.31

○ 도 급 자 : 큰빛종합건설(주), 이수건설(주)

○ 도 급 비 : 37,239백만원

나. 관련근거

○ 2013.06.25. : 보금자리주택지구계획변경 승인(국토부제2013-344호)

- 자전거도로 양측 설치(B=1.5m → B=2.0m)

○ 2014.12.17. : 공공주택지구 지구계획변경 승인(국토부제2014-805호)

- 주차장2용지 진출입구 계획 변경

○ 2016.06.15. : 공공주택지구 지구계획변경 승인(국토부제2016-344호)

- 중학교용지 신설

- 자족시설 및 공공청사 위치 및 면적 변경, 유치원용지 신설

- 단독주택용지 필지 계획 조정

- 경관녹지 폐지 및 공공공지 신설

○ 2017.09.18. : 제2017-09회 설계변경심사위원회 원안가결

다. 검토내용

○ 내곡공공주택지구 3차례의 지구계획 변경(2013년, 2014년, 2016년)에 따른 기반시설(진출입로 변경에 따른 도로, 우·오수, 상수관로 등)의 추가 및 변경 설치 공사 시행함이 타당하다고 판단됨.

○ 단가 검토

- 기존단가 적용

○ 공사비 검토(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감		비고
직접공사비	1,671,219	1,893,006	증)	221,787
제잡비 및 부가세	1,269,098	1,350,478	증)	81,413
도 급 액	2,940,317	3,243,344	증)	303,200
지급자재	3,720,198	3,679,795	감)	40,403
총공사비	6,660,515	6,923,139	증)	262,797

라. 조치계획

○ 상기 검토내용은 설계변경심사위원회에서 원안가결된 사항으로 사업의 시급성을 감안하여 우선 시행하고 추후 설계 변경시 정산·반영코자 함.

붙임  1. 부의안 및 설명서-내곡지구 내 헌릉로변 방음벽 기초형식 및 수량 변경 등 검토 외 2건

2. 의결안(제2017-9회)-내곡지구 내 헌릉로변 일부구간 방음벽 기초형식 및 수량 변경 등 검토 외 2건

3. 토지이용계획변경내역서.  끝.

부 원						택지조성부장				택지조성처장			택지사업본부장		09/22
		설재훈						박영욱			박광균			김소겸
협조자
일 상 감 사	감사실장		심윤수				감사일자 :	2017/09/21		감사일련번호: No.	893		감사의견여부 :	의견없음

시행			택지조성부-4777				(2017.09.22)			접수				()
방침번호			본부장 방침 제565호
우	135-988			서울 강남구 개포로 621								/
전화		02)3410-7579			전송	02)3410-7619		/	wogns79@i-sh.co.kr					/	공개