문서번호	도시공간개선단-12631
결재일자	2017.9.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도시공간기획팀장	도시공간개선반장
오동영		최정봉	09/25 안재혁
협 조
	주무관			강한샘

「공공성 확보를 위한 설계지침 작성 기준 수립」용역

용역변경 보고 (용역기간 재연장)

2017. 9.

「공공성 확보를 위한 설계지침 작성 기준 수립」용역

용역 변경 보고 (용역기간 재연장)

용역개요

❍ 용 역 명: 공공성 확보를 위한 설계지침 작성 기준 수립

❍ 수행기관: ********************

❍ 용역기간: 2017. 4. 13. ~ 2017. 9. 30.(170일)

❍ 계약금액: *******************

❍ 주요과업: 사전검토 업무를 위한 설계지침 작성 기준 수립

- 세부 항목별 작성 기준 및 사전검토 체크리스트, 표준목차, 설계지침 양식

❍ 추진과정

- ‘17. 3. 21.	추진계획 수립

- ‘17. 4. 14.	계약체결

- ‘17. 5. 10.	착수보고(전문가 자문)

- ‘17. 5.~7.	1~3차 점검회의

- ‘17. 8.~9.	4~5차 점검회의

용역변경(기간연장) 내용

❍ 변경내용

- 기간연장

구 분	계약 시	1차 변경	2차 변경(금회)
용역기간	‘17. 4. 13. ~ ’17. 8. 14 (120일)	‘17. 4. 13. ~ ’17. 9. 30 (170일)	‘17. 4. 13. ~ ’17. 11. 30 (232일)

- 계약금액:  변경 없음

❍ 연장사유

- 용역 수행 과정 중 과업범위 및 과업내용 변동으로 추가 과업기간이 요구되어 기한을 연장하고자 함

구 분	당 초	변 경
분석 대상	설계공모안 및 설계지침	기본구상-기본계획-설계공모안 (초기 기획부터 공모시행까지 전 과정) * 분석대상 확대 - 기본구상·계획 보고서 - 사업 수행 관련자 의견 모니터링 - 공사·설계비 관련 기준 및 제도 등
과업 내용	설계지침 작성 기준	초기 기획부터의 문제점 종합 분석
비 고	과업의 총량(협의 조정) 변동 없음

❍ 귀책사유: 우리시(지체상금 미부과)

검토내용

❍ 위 사유로 용역기간을 연장하는 것이 타당할 것으로 판단되어, 용역비 변경 없이 용역기간을 연장 처리하고자 함

향후계획

❍ ‘17. 10월: 중간보고

❍ ‘17. 11월: 최종보고

❍ ‘17. 11. 30: 용역 준공.  끝.