문서번호	도로보수과-5520
결재일자	2017.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
박병규		김준섭	09/25 이덕기
협 조

『2017년 노면표시 일상유지보수공사(연간단가)』

제 4차 작업지시 완료 검토 보고

2017. 9.

남부도로사업소

도로보수과

제 4차 작업지시 완료 검토 보고

『2017년 노면표시 일상유지 보수공사(연간단가)』제 4차

작업지시 완료에 대한 검토 결과 보고임.

현    황

사 업 명 : 2017년 노면표시 일상유지 보수공사(연간단가)-남부

시 공 사 : ************

감 리 사 : ************

공 사 비 : 금508,962,300원

검토현황

작업기간 : 2017. 7. 15 ~ 9. 10(완료보고일 : 2017. 9. 25.)

공 사 비 : 금112,292,823원

작업내용 : 총 87건(규제사항 49건, 민원 및 순찰사항 25건)

완료현황 : 78건 완료(도색 : 23,594m, 제거 : 9,452m)

미완료 현황 : 9건(신호등 공사 지연 7건, 토목공사 지연 2건)

연번	작업구분	노선명	작업위치	작업내용	미완료 사유
1	규제	도림천로	금천구 가산동 481-10 벽산밸리2차 앞	횡단보도 신설 외	신호기공사지연
2	규제	대방천로	영등구 대방천로 219	신호기 실설 외
3	규제	사평대로	서초구 서초동 1301-4(1304-4) 제일약품	횡단보도 신설 외
4	규제	시흥대로	관악구 시흥대로 526 주변 금천구 독산동 시흥IC 주변	횡단보도 이설 외
5	규제	과천대로	관악구 남현동 산93—11 주변 과천대로 남태령 정상(시경계)	신호등 교체 외
6	규제	신반포로3길	서초구 신반포로 3길 19	횡단보도 신설 외
7	내부검토	시흥대로	독산 119 안전센터	소방관서 신호시스템
8	내부검토	강남대로	한남IC경부고속도로 진입부	도로교통소통개선공사	토목공사 지연
9	내부검토	도림천로	도림천로 신동아대림아파트 앞	도로교통소통개선공사

검토결과

2017년 노면표시 일상유지보수공사(연간단가) 제 4차 작업지시 내용 중

미완료 처리건수는 9건으로,

신호등 설치공사 지연으로 인한 7건, 토목공사 지연으로 인한 2건 임.

상기와 같은 이유로 신호등 설치공사, 토목공사 지연으로 인한 9건은

관련 부서 및 시공업체와 협의하여 공사 진행하고 다음차수 완료보고 시

포함하여 처리하고자 함.

붙임 : 1. 기술검토의견서(감리).

2. 4차 완료보고 내역서.  끝.