문서번호	시민소통담당관-15414
결재일자	2017.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		소통지원팀장	시민소통담당관
양동찬		이영배	09/26 김영환
협조

지하철 역사 내 LED전광판 제작·설치

준공(납품)기한 연기보고

2017. 9.

시민소통기획관

(시민소통담당관)

지하철 역사 내 LED전광판 제작·설치

준공(납품)기한 연기보고

동대문역사문화공원역 에스컬레이터 교체공사추진으로 LED 전광판 설치위치를 변경함에따라 준공기한을 연기하고자 함

□ 개  요

○ 계 약 명 : 지하철 역사 내 LED전광판 제작·설치

○ 납품기간 : 2017. 8. 8.～10. 7.

○ 계약금액 : 142,523,400원

○ 계 약 자 : 주식회사 알지비(대표자:유동길)

□ 준공기한 연기

○ 준공기한

- 당 초 : 2017. 8. 8.～10. 7.

- 변 경 : 2017. 8. 8.～10. 27.

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

- 서울교통공사에서 동대문역사문화공원역사 내 에스컬레이터 교체 공사를 추진함에 따라 납품장소를 여의나루역으로 변경

붙임 : 2017년도 노후에스컬레이터 교체공사 발주계획 1부.