2015 교통사고 잦은곳 개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 동대문교차로등 26개 지점

○ 규    모 : 교통안전 시설(신호등,횡단보도,노면표시등) 설치공사 1식

○ 사업기간 : 2015.1.1.~12.31

○ 사 업 비 : 4,174백만원

□ 추진경위

○ '15. 1  : 실시설계용역 발주

○ '15. 6 : 관계기관 협의회의 개최(시, 자치구, 도로사업소, 서울경찰청, 경찰서)

○ '15. 6 ~ 7  : 협의(교통규제심의)결과 반영하여 실시설계

○ '15. 7 ~ 8  : 예산배정 및 공사발주

○ '15. 9 ~12 : 공사시행

□ ’15년 예산 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산 및 집행 현황
	현 액	이월액	예산액	집행액	집행율
계	4,174	704	3,470	3,027	72.5%
시설비	4,028	668	3,360	2,938	72.9%
감리비	141	36	105	89	63.1%
시설부대비	5		5

□ 집행실적

○ 동대문교차로등 26개 지점 교통사고 잦은곳 개선공사 완료

2016 교통사고 잦은곳 개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 여의교오거리등 24개 지점

○ 규    모 : 교통안전 시설(신호등,횡단보도,노면표시등) 설치공사 1식

○ 사업기간 : 2016.1.1.~12.31

○ 사 업 비 : 1,878백만원

□ 추진경위

○ '16. 1 : 실시설계용역 및 관계기관 협의

○ '16. 3 : 예산 재배정

○ '16. 4 ~12 : 공사 시행

□ ’16년 예산 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	예산 및 집행 현황
	현 액	이월액	예산액	집행액	집행율
계	1,878	1,118	760	1,704	90.7%
시설비	1,806	1,068	738	1,671	92.5%
감리비	71	50	21	33	46.5%
시설부대비	1		1

□ 집행실적

○ 여의교오거리등 24개 지점 교통사고 잦은곳 개선공사 완료

2017 교통사고 잦은곳 개선사업

□ 사업개요

○ 위    치 : 영등포교차로등 22개 지점

○ 규    모 : 교통안전 시설(신호등,횡단보도,노면표시등) 설치공사 1식

○ 사업기간 : 2017.1.1.~12.31

○ 사 업 비 : 1,118백만원

□ 추진경위

○ '16.3~`17.5 : 실시설계용역 및 관계기관 협의

○ '17. 5 : 예산 재배정

○ '17. 5 ~12 : 공사 시행(추진중)

□ ’17년 예산 집행현황

(‘17. 9.28 기준, 단위 : 백만원)

구 분	예산 및 집행 현황
	현 액	이월액	예산액	집행액	집행율
계	1,118	0	1,118	83	7.4%
시설비	1,093		1,093	83	7.6%
감리비	25		25		0.0%
시설부대비	0

□ 집행실적

○ 영등포교차로등 22개 지점 교통사고 잦은곳 개선공사 추진중