아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰(2016년 노후불량 하수관로 조사, 기본 및 실시설계용역)

1. 물재생계획과-13189(2017.10.11.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행중인「2016년 노후불량 하수관로 조사, 기본 및 실시설계용역(중랑,난지/탄천,서남처리구역)」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내용

용역명		2016년 노후불량 하수관로 조사, 기본 및 실시설계용역 (중랑, 난지처리구역)	2016년 노후불량 하수관로 조사, 기본 및 실시설계용역 (탄천, 서남처리구역)
용역사		㈜동명기술공단종합건축사사무소 신완수 외 2	㈜이산 이원찬 외 2
용역비		금890,200,000원	금879,100,000원
용역 기간	당초	2016. 8. 9. ~ 2017. 10. 12.	2016. 8. 9. ~ 2017. 10. 12.
	변경	2016. 8. 9. ~ 2017. 12. 21.	2016. 8. 9. ~ 2017. 12. 21.

나. 귀책소재 : 서울특별시

다. 연기사유

- 노후 하수관로 추가 실시설계 시행 및 자치구 협의 지연에 따른 건설기술심의 절차 이행을 위한 절대공기 부족

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 방침서(준공기한 연기 보고) 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	물재생계획과장
주무관	이승주		배수설계팀장	심형보		물재생계획과장	10/12 하상문
협조자	계약1팀장	조현
시행	물재생계획과-13266	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3858	/전송	02-2133-1042	/	dltmdwn@seoul.go.kr	/	부분공개(5)