문서번호	공원조성과-9691
결재일자	2017.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공원개발팀장	공원조성과장		푸른도시국장
협 조

경춘선숲길 관련 회의 결과 보고

푸 른 도 시 국

(공원조성과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

경춘선숲길 현안사항 관련 회의 결과 보고

경춘선숲길의 성공적 사업추진을 위해 아래와 같이 현안사항 관련 관계자 회의를 개최하고 결과를 보고 드림

회의개요

❍ 일    시 : 2017. 8. 8(화) 10:00~11:00

❍ 장    소 : 푸른도시국장실

❍ 참 석 자 : 13명

- 서울시 : 푸른도시국장, 공원조성과장, 공원개발팀장, 도기본 공원시설과장, 북서울꿈의숲관리소장, 담당 등

- 노원구 : 공원녹지과 백인기 팀장, 문화과 박홍성 팀장, 담당 등

- 기  타 : 경춘선숲길 감리단장

❍ 회의내용 : 경춘선숲길 현안사항 논의

- 무허가 건물지 철거현황 및 공사방향 논의

- 경춘선숲길 3단계 구간 공원조성 공사 관련 현안

- 경춘선숲길 개원행사 관련 사항 및 기타사항 등

회의결과

❍ 무허가 건물지 등 철거현황 및 공사방향 논의

- 무허가 건물지는 관련절차 완료 및 행정대집행 집행정지 신청이 기각(7.20일)됨에 따라 8.17 행정대집행 예정이며, 9월말까지 철거가 완료될 수 있도록 추진 예정. (단, 거주세대(2세대) 등 일부 변수 존재)

- 이와 관련 무허가 건물지 구간 시공사 선정이 필요하나, 현장여건 등을 감안할 시 별도 발주하는 것 보다는 3단계 공사업체에서 시행하는 것이 합리적일 것으로 판단되며, 발추처인 도기본에서 관련 내용 검토 후 추진

※ 무허가 건물지는 2단계 공사 구간에 포함되었으나, 보상(이전) 지연에 따른 공사 보류 및 추진시기 불투명 등 공사 추진 곤란으로 인해 타절한 바 있음.

- 해병전우회 및 모범운전자회 이전과 관련 노원구에서는 사업추진에 차질이 없도록 이전 시행 (노원구 공원녹지과에서 관련내용 전파)

❍ 경춘선숲길 3단계 공원조성 공사 관련

- 증기기관차 뒤 컨테이너 6량 설치와 관련 우리시는 컨테이너 설치 및 내부 마감(우레탄폼 시공 후 석고보드 마감)을 시행하고, 노원구에서 경춘선숲길 개방전까지 내부 전시를 추진하기로 하였으나, 노원구 전시계획이 확정되지 않은 현 상황에서 내부 마감 공사 추진시 향후 재시공으로 인한 예산 낭비 우려 높음.

- 이에 우리시는 컨테이너 내부 마감 시 경량 바 까지 설치하고, 그 외 시공은 노원구에서 전시계획에 맞도록 전기/통신/설비/인테리어 등 별도 추진 (※ 노원구 관련사항 구청장 보고 완료, 8.4일)

- 노원구(문화과)에서 추진중인 화랑대역사 내부(천장 등) 보수 및 역사 주변 정비사업과 관련 경춘선숲길 개원 이전에 완료될 수 있도록 특단의 조치를 강구하여 경춘선숲길 개원에 장애가 없도록 조치 시행

❍ 경춘선숲길 개원행사 관련

- 성공적 개원행사를 위해 상호 협력하여 개원행사를 준비하고, 개원행사에 맞는 프로그램 등 검토

❍ 기타사항

- 노원구 철도공원 추진과 관련 노면열차 등 일부 시설물 도입을 추진중에 있는 바, 철도공원 확정전에 경춘선숲길 내 설치 가능하도록 협조 요청 (노원구 문화과 팀장 제안)한 것은

- 철도공원에 대한 정책결정․제반절차 이행 등 관련 사항 선행이 필요하며, 그 후 확정된 계획에 부합되도록 열차 등 설치

조치계획

❍ 도기본(방재시설부)에서는 무허가 건물지 구간 공사 추진 검토 및 시행

❍ 노원구에서는 舊화랑대역사 및 역사주변 정비사업과 관련 경춘선숲길 개원행사 전까지 사업 완료(10월말) 조치

❍ 노원구 및 도기본(방재시설부)에 회의 결과를 통보하여 관련 사항 공유. 끝.