문서번호	물재생계획과-12605
결재일자	2017.9.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
전문관	하수관리팀장		물재생계획과장		물순환안전국장
배원영	이인규		하상문		09/21 권기욱
협 조
	배수설계팀장					심형보
	하수계획팀장					김준형
	하수정비팀장					이두환

2017년 하반기 하수관로 공사장 점검계획

2017. 9

물순환안전국

물재생계획과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 하반기 하수관로 공사장 점검계획

하수도 사업의 안전 및 품질 향상과 부실시공을 방지하고, 예산이월‧불용 최소화하기 위해 부진사업 독려하고자 하수도 공사장점검 실시

□ 점검목표

○ 도로함몰 zero를 위한 하수도공사 품질향상 방안 이행 여부(16.11)

○ 시민이 불편해 하지 않는 하수관로 공사 추진(공사홍보 실적 등)

○ 예산이월,불용 최소화를 위한 부진사업 추진 독려

○ 안전관리 강화를 통한 재해 없는 공사장 조성

□ 점검개요

○ 점검대상 : 공사현장 (17. 9월 현재 공사중 및 완료 134개현장)

- 신설개량 28, 종합정비 22,  보수보강 59,

- 도로함몰예방 노후하수관로 정비 - 25개 자치구

○ 점검기간 : ’17. 9. 21 ~ 10.13 (필요시 연장)

○ 점검반 편성 : 6개조 18명(사업관리용역 전문가 6명 포함)

조명	점 검 자	점검대상 자치구	건수
1조	하수관리팀장, 김영희	종로,중구,용산,성동	12
2조	하수정비팀장, 정재윤	광진,동대문,중랑	18
3조	배수설계팀장, 이승주	성북,강북,도봉,노원	14
4조	하수계획팀장, 홍광호	은평, 서대문, 마포, 강서	14
5조	하수관리팀장, 배원영	양천*, 구로, 금천, 영등포,강남,송파,강동	39
6조	하수관리팀장, 강청금	동작,관악,서초	12
* 양천구 시의회 도안위 김희걸의원 합동점검(별도 일정확인후 점검시행)

※ 하수도 주치의 포함하여 하수사업 점검시행

□ 중점점검 사항

○ 도로함몰 예방을 위한 하수관로 연결 접합부 부실시공 방지(16. 11)

∙ 하수도 지반 다짐관리 개선이행확인(간이 다짐기 사용, 시료채취 등)

∙ 하수BOX, 하수맨홀과 하수관로 연결 접합여부 확인

∙ 접합부 침하 및 파손에 대비한 접합부 주위 다짐여부 등

∙ 침하에 따른 연결부 이탈 등의 문제점 발생여부 확인

∙ 하수BOX 및 관로 폐공처리 관련 토사유실로 인한 도로함몰 여부 확인

∙ 연결관로 접합 개선방안 이행여부(고무지수링, 수밀시트 등)

∙ 하수관로 되메우기 토사 적정성 여부

- 서류확인(사진대지) 및 필요시 줄파기 실시 되메우기 적정성 확인

○ 돌발강우시 하수관로 내부 메뉴얼 준수(16. 1)

∙ 하수관로내 작업시 안전작업계획서 제출 여부(사전교육 실시 등)

∙ 일기예보와 일기상황 고려한 투입계획 수립

∙ 안전원을 배치하여 상시 작업확인

→ 지하,지상 안전요원 배치(2인이상),

출입인원, 시간 확인, 통신장비 작동 여부 등

○ 도로함몰 예방 노후관로 정비 품질관리(17. 8. 29 시행통보)

∙ 굴착구간 내 물돌리기 시행,  관기초 다짐 확인

∙ 하수관로 절단시 안전 보호장구 착용 등

○ 시민이 불편해 하지 않는 하수관로 공사추진

∙ 보도블럭 10계명 이행여부

∙ 저소음 커터기, 압쇄기, 리퍼 등 저소음장비 사용 여부

∙ 발생토사 즉시 반출, 보행자 통로, 자재 보관, 공사홍보 및 안내 등

∙ 시민친화형 교육 이수 여부 확인

∙ 하수도 공사 주민홍보 방안 이행여부(건설알림이, 주민설명회 등)

○ 예산이월 및 불용 예상사업에 대한 공사장 공정점검

∙ 현재공사 공정율 확인 및 이월,불용 최소화 하기 위한 부진사업 추진 독려

□ 행정사항

○ 물재생계획과

- 경미한 부적합 사항은 현장 시정조치

- 부실시공 사례 적출시 공사중지 및 재시공 조치

∙ 부실 정도가 중한 경우 시공사, 감리사 벌점 부과 등 엄중 조치

- 점검반별 점검결과는 점검 다음날까지 제출

- 하수도 주치의 일정확인후 하수도 공사장 점검 시행

○ 자치구

- 공사장별 시공계획서, 안전관리계획서, 설계도서 및 점검장비(랜턴, 방진복, 장화, 장갑 등) 준비

- 관로내부 검사를 위한 CCTV 지원 등

- 시의원 합동 점검 시행하는 자치구에선 의원 일정확인 후 점검시행

붙    임 1) 2017년 하반기 점검대상 사업 1부.

2) 하수관로 공사현장 점검결과 보고서(서식) 1부.

3) 점검체크리스트 1부.

4) 하수도 주치의 명단 1부 끝.