아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 계약변경 의뢰(공공한옥 유지보수 전기공사)

우리부서에서 시행중인 「공공한옥 유지보수 전기공사」에 대하여 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 :  공공한옥 유지보수 전기공사

나. 계 약 기 간  :  2017. 08. 04. ~ 2017. 10. 31.

다. 계 약 자 :  ******

라. 계 약 금 액  :  ******************

마. 준공기한 변경내용  :

공사명	준공기한		비고
	당초	변경
공공한옥 유지보수 전기공사	2017. 10. 31.	2017. 12. 10.	증40일

붙 임 : 1. 준공기한 연기보고 1부.

2. 준공기한 변경의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	한옥조성과장
주무관	김현우		한옥지원센터장	최석진		한옥조성과장	10/19 진조평
협조자	한옥문화팀장	정미영		계약1팀장	조현
시행	한옥조성과-11530	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)