문서번호	도로시설과-13360
결재일자	2017.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
전성민	김두석	11/06 박상돈

도로시설물(자치구) 긴급보수예산 재배정 검토 보고

(응봉교앞보도육교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.11.

도로시설물(자치구) 긴급보수 검토 보고

자치구에 위임관리되고 있는 도로시설물(보도육교) 긴급보수예산 지원에 대하여 검토 보고함

(성동구--응봉교앞보도육교)

		시설물 정비 내용

○ 개략사업비 : 291백만원

시설물명	응봉교 앞 보도육교
준공년도	1980	구조형식	STB
제 원	폭4.0m, 연장26m	상태등급	C
정비내용	- 철판교체 및 보수 : 1ton - 도장 보수 : 987㎡ - 포장면 교체 : 130㎡

○ 추진 경위 및 계획

- ´16.09. ~ 10. : 정밀점검 용역(상태등급 C등급)

- ´17.09. ~ 10. : 실시설계용역

- ´17.10.30.    : 보수예산 요청

- ´17.11.       : 공사 발주

- ´18. 1. ~ 6.  : 공사 시행

○ 위치도

○ 평면도

○ 주형단면도

○ 주형 외부손상현황 및 보수대상

○ 주형 내부손상현황 및 보수대상

○ 계단부 손상현황

계단부 포장 파손	강재부식 및 포장 노후

○ 2016년 정밀점검용역 결과 제시된 의견

- 응봉교앞보도육교는 공용된 지 37년이 경과된 시설로서

- 각각의 부재에 발생된 균열, 강재 부식, 도장탈락 및 들뜸, 단면손실, 강재 파손 및 찢김, 볼트 및 너트 탈락, 백태, 콘크리트 균열, 논슬립 탈락 등의 영향으로 안전등급“C”등급으로 지정됨

- 국부적으로 발생한 손상‧결함부에 대해 보수를 시행하면 사용재료의 건전성, 구조물의 기능성과 안전성을 확보할 수 있음

※ 안전등급 “C”등급 시설물의 상태 : 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태

		검토의견

○ 거더내·외부 모두 부식 및 단면손실 상태가 심각하고, 도장탈락 상태도 불량하여 전면 재도장이 필요한 것으로 판단됨

○ 외부강선덮개철판은 주행차량의 충격으로 심하게 파손 변형되어 주형강재까지 파손된 상황이며 보수가 시급함

○ 계단부의 경우 강재의 부식 및 포장들뜸현상이 심하여 정비가 필요함

○ 상기 정비를 시행하여 열화∘손상의 진행을 억제하고, 구조물의 안전성, 내구성, 기능성 등을 유지하고 실용상 지장이 없는 소요의 성능을 회복토록 함

○ 시도 상에 있는 보도육교는 서울시 소유의 시설물이며 유지관리는 자치구에 위임되어 예산지원 가능함.

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제47조(비용의 지원)

- 자치구 위임 도로시설물 관리비용 부담방법 개선(도시안전실장방침-10030호, ´14.6.9)

⇒ 구조 안전에 관한 비용

⇒ 강구조 부식방지 예방과 관련된 유지관리비용(도장, 포장 포함)

		처 리 계 획

○ 상기 시설물 보수·보강에 소요되는 공사비를 아래와 같이 2017년  도로시설물(자치구 위임관리)긴급보수예산에서 지원코자 함.

○ 예산현황

(단위 : 원)
예산구분	예산액	기배정액	금회 배정액	배정잔액
계	5,230,968,280	4,832,265,280	291,000,000	107,703,000
‘16년이월	230,968,280	230,968,280	-	-
‘17년	5,000,000,000	4,601,297,000	291,000,000	107,703,000

붙임 : 1) 보수·보강 공사 예산 요청 공문 1식.

2) 사업계획서(성동구청).

3) 정밀점검용역 및 실시설계용역 공사비 비교표.

4) 설계내역서. 끝.