문서번호	시설보수과-4222
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	11/13 代박영종
협 조
	주무관			이경수
	주무관			정용재
	주무관			양지웅

2017년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

성동도로사업소

(시설보수과)

2017년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획

2017년 겨울철 대비 도로시설물에 대한 안전점검을 시행하여 안전 취약시기 도로시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

2017년 겨울철 대비 도로시설물 안전점검 계획 통보(도로시설과-13577, 2017.11.10.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검대상 도로시설물 : 50개소

(단위:개소)

구 분	합 계	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개	옹벽	비고
계	48(2)	23	9			3	12	1(2)
1종	1(2)							1(2)
2종	16	6	2			3	5
법정외	31	17	7				7

※ 청계천복개구조물(좌,우안) : 황학교 ~ 고산자교 구간 관리(통계상 서부,북부)

추진기간 : 2017.11.13(월) ~ 11.30(목)

점검반 편성

〇 성동도로사업소 : 3개반 11명

〇 시설물안전자문단 : 11명(주치의 3명 + 시설물안전자문위원 8명)

점검방법

〇 시특법대상시설 및 법정외시설 시설안전자문단과 합동점검

* 점검조는 시설별 3인(담당 2인 + 시설물안전자문위원 1인)으로 구성

〇 도로시설물 부재별 점검사항에 의거 점검시행

주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공 통 사 항	시설물 하부 화재발생요인 방치 여부 고드름 및 결빙우려지역 집중순찰, 포장 파손 등 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 응급복구체계 획립을 위한 비상연락망 정비
도로 시설물	포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변파손, 누락, 막힘) 교량받침 가동상태, 신축이음 전,후 구조물 경계단차 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일 탈락 등 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등

도로시설물별 점검조

구분	담당자	시설물수	시 설 명		외부전문가
					성 명	소요일
1	최태석(정) 양지웅(부)	13	1종	면목천복개도로	안홍준	1일
			2종	제2마장교마장교 포함, 이문고가차도, 옥수터널,	한삼희	2일
				무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교,	우재경	2일
				서울숲다리교, 신답고가차도, 청량제1고가
2	이경수(정) 정용재(부)	12 (1)	1종	청계천복개도로(좌안)	조광현	1일
			2종	군자교, 성동교, 장안교,	홍승근	2일
				장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도,	이호영	2일
				답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	정용재(정) 이경수(부)	11 (1)	1종	청계천복개도로(우안)	조광현	1일
			2종	영동대교북단고가차도	안홍준	0.5일
			법정외	고산자교, 뚝섬고가차도,	안홍준	0.5일
				무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청),	양승이	2일
				행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 금호고가차도
4	양지웅(정) 최태석(부)	12	1종	-
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도	김수철	1일
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 먹골교,	김영환	2일
				청량제2고가, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도

※ 1) 점검기간 중 시설물 담당자가 시설안전자문위원과 일정 조정하여 점검 실시

2) 시설안전자문위원 점검 참여 불가 등 변경사유 발생시 자체적으로 교체 시행

Ⅲ		지적사항 조치

경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업 지시하여 보수 완료

구조물 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련분야 전문가

(시설물안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

Ⅳ		행 정 사 항

안전점검 시행 결과 도로시설과 제출 : 2017.12.5.(화)

점검수당 지급

〇 안전점검 결과 보고서에 의거 점검수당 지급

※ 수당 : 200,000원/인ㆍ회 × 17일 = 3,400,000원

〇 예산과목

ㆍ 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영,      사무관리비(205-201-01)

붙임  1. 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 안전점검 결과(양식1, 집계) 1부.

3. 안전점검 보고서(양식2) 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

5. 겨울철대비 시설물 안전자문위원 명단 1부.

6. 겨울철대비 도로시설물 안전점검 관련공문 1부. 끝.