문서번호	정수운영과-14019
결재일자	2017.11.27.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	11/27 차윤기
협 조
	주무관			윤충용
	전문경력관			이건우

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

광암아리수정수센터

염소 기화기 구매 및 이전설치 변경계약 보고

2017. 11.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

광암아리수정수센터

염소기화기 구매 및 이전설치 변경계약 보고

염소기화기 구매 및 이전설치 계약의뢰시 설계심사 금액을 계약의뢰

하여야하나, 금액 표기 착오로 차액 발생하여 계약 변경 시행코자 함

Ⅰ		염소 기화기 구매 및 이전설치

□ 계약건명 :  염소 기화기 구매 및 이전설치

□ 계약기간 :  2017. 08.21 ~ 11. 29.

□  계약내용

○ 염소기화기(113KG/HR)설치 – 1대,염소기화기(113KG/HR)철거 - 2대

□ 계약금액     : 96,367,000원

□  계약업체     : 동방수기

Ⅱ		계약금액 변경사유

□ 계약금액 변경사유

〇 『염소기화기 구매 및 이전설치』 설계심사금액 109,021,000원 본청 계약의뢰하여야하나,발주당시 금액 표기 착오로 109,296,000원 계약의뢰하여,

제한경쟁시 낙찰율 적용 96,367,000원 계약됨

·발생된 차액 비율 적용하여(96,367,000원/109,296,000원=0.8817065583)

,설계심사금액 109,021,000원* 적용(0.8817065583)하며 변경계약금액

96,124,530원임

·차액금액 242,470원(96,367,000원-96,124,530원) 감액하여 변경

계약 96,124,530원 하고자 함

〇 기화기 철거품 고재처리 발생하지 않아,정산할 사항이 없음

□ 계약금액 변경

구 분	당 초	변 경	감액
계약금액	96,367,000원	96,124,530원	242,470원

Ⅲ		향후계획 및 처리의견

□ 계약금액 변경에 따른 변경계약의뢰(행정관리팀)

□ 계약금액 변경에 대한 합의서(계약업체), 변경계약후 대금지급 시행

붙임: 1. 염소기화기 구매 및 이전설치 계약의뢰 기안문 1부

2. 계약심사 설계내역서 금액                     1부

3. 합의서                                       1부.끝