디지털3단지~두산길간 지하차도 건설 기본 및 실시설계

서부간선 진출교통량 및 디지털 3단지 진출 교통량을 지하차도로 분산시켜

G-Valley의 주요 교통로인 디지털 단지로(수출의 다리)의 교통 지정체를 해소

사업개요

위    치 : 디지털3단지(가산동319-10)~두산길(독산1동 998-10)

사업내용 : 도로개설  폭 4차로, 연장 452m (지하차도 290m)

사업기간 : 2012 ~ 2016(설계기간 : 2013. 5. ~ 2014. 5.24)

총사업비 :  45,341백만원(설계비 : 739백만원)

사업추진현황

'10. 3.~‘10.12. : 타당성조사 및 기본계획 용역

'11. 7         : 지하차도 설치사업 투자심사(재검토)

'13. 5.24      : 기본 및 실시설계용역 착수

'13.10.21     : 설계자문회의(1차)

'13.11.22     : 설계자문회의(2차)

'14. 1. 8 : 서울도시디자인심의

'14. 1.21 : 건설기술심의

'14. 2.21 : 도시계획위원회 및 철도입체교차시설심의

2014. 3. 7 : 설계내실화를 위한 주민자문단 구성

2014. 3.18 : 주민자문단 사업설명

2014. 4. 1 : 주민설명회 개최

2014. 4. 4 : 설계자문회의 개최

2014. 4.10 : 철도공사, 교학사, 다함이텍 업무협의(지반조사)

2014. 4.22 : 지반조사 및 시굴 추가비용 확보요청

향후추진계획

2014. 4.30 : 지반조사 및 시굴추가비용 설계반영 협의

2014. 5. 8 : 설계변경 재계약

2014. 5.24 : 설계완료 (지반조사 및 시굴추가에 따른 과업기간 연장)

위    치    도

	N
S